2019년도

공사코드: KR-CND-19-022

계약번호:

공사명: 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사

설     계     서

(회계)

예 산  센 터 : 5000541(부산경남-수탁(시설)-일반개량FC)

예 산  과 목 : 51050251 (일반개량)수선유지비-공비

단위사업코드 : C41913 (급수 및 기계설비)

세 금  코 드 : V1

목  차

Ⅰ. 설계설명서	4

Ⅱ. 공사시방서	10

Ⅲ. 특별시방서	17

Ⅳ. 예정공정표	20

Ⅴ. 설계예산명세서	21

Ⅵ. 공종별 예산조서	22

Ⅶ. 설계도	23

Ⅰ. 설계설명서

1. 공 사 명 : 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사

2. 위    치 :

① 경  부  선   부산역

② 동  해  선   부전역, 신해운대역

③ 경부고속선   울산역

④ 경  전  선   진영역, 진례역, 창원중앙역, 창원역, 마산역, 함안역, 군북역, 진주역

3. 목    적 : 본 공사는 에스컬레이터에서 운행 중 비정상적인 동작(역주행 또는 과속운전)이 발생할 경우 이를 감지

하여 에스컬레이터를 정지시키는 보조브레이크 장치를 설치함으로써 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

4. 공사개요

역 사	수 량(대)	규 격	공 사 범 위(보조브레이크 장치 설치)
부산역	2	6M이하	#26, #27
	10	14M이하	#12, #14, #16, #17, #18, #20, #21, #22, #24, #25
부전역	4	14M이하	#1, #2, #3, #4
신해운대역	6	14M이하	#1, #2, #7, #8, #9, #10
	8	14M이하
울산역			#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8
진영역	4	14M이하	#1, #2, #3, #4
진례역	4	14M이하	#1, #2, #3, #4
창원중앙역	4	14M이하	#3, #4, #5, #6
창원역	4	6M이하	#1, #2, #3, #4
	4	14M이하	#7, #8, #9, #10
마산역	6	14M이하	#1, #2, #5, #6, #7, #8
함안역	4	14M이하	#1, #2, #3, #4
군북역	4	14M이하	#1, #2, #3, #4
진주역	2	6M이하	#1, #2
	4	14M이하	#3, #4, #5, #6
합 계	8	6M이하
합 계	62	14M이하
총합계	70	6M이하+14M이하

5. 공사기간 : 착수일로부터 85일간

6. 참가자격

- ｢건설산업기본법시행령｣ 제7조에 의한 ‘승강기설치공사업’ 등록업체

7. 승강기 기본사양(4-1)

선 별	역 사	호 기	종 류	규격 / 수직높이	설치년도	제조사	설치대상	비 고
경부선	부산	12	E/S	1200형/7.4M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	14	E/S	1200형/7.3M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	16	E/S	1200형/7.5M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	17	E/S	1200형/7.3M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	18	E/S	1200형/7.5M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	20	E/S	1200형/7.3M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	21	E/S	1200형/7.3M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	22	E/S	1200형/7.5M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	24	E/S	1200형/7.4M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	25	E/S	1200형/7.4M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	26	E/S	1200형/5.3M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
경부선	부산	27	E/S	1200형/5.3M이하	2010	티센크루프엘리베이터	보조브레이크
동해선	부전	1	E/S	1200형/9.1M이하	2003	한국후지	보조브레이크

7. 승강기 기본사양(4-2)

선 별	역 사	호 기	종 류	규격 / 수직높이	설치년도	제조사	개량대상	비 고
동해선	부전	2	E/S	1200형/8.6M이하	2003	한국후지	보조브레이크
동해선	부전	3	E/S	1200형/8.6M이하	2003	한국후지	보조브레이크
동해선	부전	4	E/S	1200형/8.6M이하	2003	한국후지	보조브레이크
동해선	신해운대	1	E/S	1200형/5.3이하	2013	현대엘리베이터	보조브레이크
동해선	신해운대	2	E/S	1200형/5.3M이하	2013	현대엘리베이터	보조브레이크
동해선	신해운대	7	E/S	1200형/5.3M이하	2013	현대엘리베이터	보조브레이크
동해선	신해운대	8	E/S	1200형/5.3M이하	2013	현대엘리베이터	보조브레이크
동해선	신해운대	9	E/S	1200형/5.3M이하	2013	현대엘리베이터	보조브레이크
동해선	신해운대	10	E/S	1200형/5.3M이하	2013	현대엘리베이터	보조브레이크
경부고속선	울산	1	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	2	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	3	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	4	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	5	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	6	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	7	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경부고속선	울산	8	E/S	1200형/10M이하	2010	한국후지	보조브레이크
경전선	진영	1	E/S	1200형/7.5M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	진영	2	E/S	1200형/7.5M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크

7. 승강기 기본사양(4-3)

선 별	역 사	호 기	종 류	규격 / 수직높이	설치년도	제조사	개량대상	비 고
경전선	진영	3	E/S	1200형/7.5M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	진영	4	E/S	1200형/7.5M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	진례	1	E/S	1200형/6M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	진례	2	E/S	1200형/6M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	진례	3	E/S	1200형/6M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	진례	4	E/S	1200형/6M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원중앙	3	E/S	1200형/6.5M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원중앙	4	E/S	1200형/6.5M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원중앙	5	E/S	1200형/6.5M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원중앙	6	E/S	1200형/6.5M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	1	E/S	1200형/4.5M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	2	E/S	1200형/5.2M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	3	E/S	1200형/4.5M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	4	E/S	1200형/5.2M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	7	E/S	1200형/8.7M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	8	E/S	1200형/8.7M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	9	E/S	1200형/8.7M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	창원	10	E/S	1200형/8.7M이하	2010	쉰들러엘리베이터	보조브레이크
경전선	마산	1	E/S	1200형/8.4M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크

7. 승강기 기본사양(4-4)

선 별	역 사	호 기	종 류	규격 / 수직높이	설치년도	제조사	개량대상	비 고
경전선	마산	2	E/S	1200형/8.4M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	마산	5	E/S	1200형/8.6M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	마산	6	E/S	1200형/8.6M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	마산	7	E/S	1200형/8.6M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	마산	8	E/S	1200형/8.6M이하	2010	현대엘리베이터	보조브레이크
경전선	함안	1	E/S	1000형/8.9M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	함안	2	E/S	1000형/8.9M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	함안	3	E/S	1000형/8.9M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	함안	4	E/S	1000형/8.9M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	군북	1	E/S	1000형/8.8M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	군북	2	E/S	1000형/8.8M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	군북	3	E/S	1000형/8.8M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	군북	4	E/S	1000형/8.8M이하	2012	우성엘리베이터	보조브레이크
경전선	진주	1	E/S	1200형/5.9M이하	2012	한국후지	보조브레이크
경전선	진주	2	E/S	1200형/5.9M이하	2012	한국후지	보조브레이크
경전선	진주	3	E/S	1200형/6.3M이하	2012	한국후지	보조브레이크
경전선	진주	4	E/S	1200형/6.3M이하	2012	한국후지	보조브레이크
경전선	진주	5	E/S	1200형/6.3M이하	2012	한국후지	보조브레이크
경전선	진주	6	E/S	1200형/6.3M이하	2012	한국후지	보조브레이크

※ 주의사항

1. 필히 현장확인, 실측 및 규격(제원) 확인 후 주문제작에 착수 할 것.

2. 설치 기종별 부품이 상이하므로 적정 규격에 맞도록 기종 및 제작사 확인 후 시행 할 것.

Ⅱ. 공사시방서

○ 일반시방서

본 공사는 하기 특별 시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 시방서에 기재되지 아니한 사항은 국토교통부 제정「건축공사 표준 시방서」 (첨부생략) 및 한국철도공사「공사 및 용역관리규정」에 의거 시행하여야 한다.

1. 현장대리인

「건설산업기본법시행령」 제35조 각 호의 규정에 의한 기술자 인을 현장에 상주시켜야하며, 공사계약서 및 설계도서에

의거 공사시행을 충실히 수행하고, 이석시에는 감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 공사기록 사진

계약당사자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 원판과 함께 사진첩을 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.

특히, 육안검사가 불가능한 개소는 필히 사진찰영하여야 한다.

촬 영 구 분	규 격	수 량	종 류	비 고
착 공 전 사 진	120 × 80	각 1 부	칼 라	동일장소 또는 동일방향 에서 촬영할 것
준 공 사 진	120 × 80	각 1 부	칼 라
주요 공정 사진	120 × 80	각 1 부	칼 라

3. 안전관리

본 공사 시행에 있어 제반 안전관리에 각별히 유의하고 아래와 같은 안전조치를 취해야 하며, 현장 내에서 발생한

제반 사고에 대하여는 민, 형사상 일체의 책임을 계약당사자가 져야한다.

가. 책임자 선임 : 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 안전관리자로서의 의무를 성실히 수행해야 한다.

1) 본 공사 시행 중 안전조치 불이행과 작업원 부주의로 인한 사고가 발생하여 사상자가 발생하거나 발주기관,

계약당사자 및 제3자의 재산상손실이 있을 때에는 계약당사자 부담으로 이를 변상 또는 원상복구하여야 한다.

2) 본 공사 시행 중 여객의 안전을 위해 감독자의 지시에 따라 위험표지판 및 여객의 접근을 막을 수 있는 적절한

안전설비를 설치 하여야 한다.

나. 안전관리자의 임무

1)「산업안전보건법 시행령」 제13조(안전관리자의 직무 등) 준수

2) 법 제33조(유해하거나 위험한 기계•기구 등의 방호조치 등), 법 제34조(안전인증) 관련 기계, 기구, 설비 및 보호구

등의 구입 시 적격품의 선정

3) 현장 안전교육 계획수립 및 실시

4) 현장 순회점검 및 지도

5) 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립

다. 안전관리보고

안전관리자는 아래사항에 대한 실시설계서를 작성하여 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전관리비 사용계획서를

공사감독자에게 제출하고 사용실적을 사진과 영수증을 첨부하여 보고하여야 한다.

1) 안전, 보건교육

2) 작업장 안전관리

3) 작업장 보건관리

4) 사고조사 및 대책수립

5) 기타 안전, 보건에 대한사항

라. 안전상의 조치

1) 작업 중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

2) 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소

3) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치

4) 공사용 자재 및 기계기구류 건축 한계선 내의 방치

5) 공사 시행중 발생한 각종 안전사고는 즉시 공사감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.                * 열차운행에 지장을 주는 작업은 공사감독자와 협의하여 승인을 득한 후 시공하여야 하며 당일 작업전 관할

역사와 공사 내용에 대한 일일작업협의(일일작업협의서 작성) 후 착수

마. 계약자의 책무

1) 본 시방에 의거 공급될 자재는 KS 및 KC인증을 받은 부품으로 제작 설치되어야 하고 안전성과 정밀성이

확보되어야 한다.

2) 본 건에 대한 재질의 변경은 동등이상의 재질로서 감독원의 승인을 득한 후 변경 할 수 있다.

3) 계약상대자는 계약체결 후 현장을 확인 점검하고 감독원이 지정한 기일 내에 설치도면 및 예정공정표를 공사에

제출하여 승인을 받아야 한다.

4) 계약상대자는 공사감독자의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고 하여야 한다.

바. 공사도서의 제출 및 승인

1) 계약상대자는 착공일로 부터 15일 일내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여 아래의 승인도서를 제시하여 공사의

승인을 받아 제작에 임하여야 한다.

2) 주요구성품 도면 및 주요자재 제원, 전기회로도, 조립도, 공정표 등

사. 반입 및 설치

1) 계약상대자는 승강기로 인해 다른 시설물에 지장이 없도록 반입 및 설치하고 다른 시설물에 지장을 주었을 경우 즉시 계약상대자 책임 하에 조치하여야 한다.

2) 물품의 반입 및 설치 시 발생하는 모든 안전사고는 계약상대자 책임으로 하며 납품완료 시까지 모든 안전규정을 준수 하여야 한다.

3) 계약상대자는 물품의 반입에서 납품검사 완료 시 까지 기자재 등에 대한 손상, 분실 등이 발생하였을 경우 즉시 원상복구 하여야 한다.

4) 부품의 현장반입은 철도이용객의 통행에 지장이 없도록 발주기관과 협의하여 반입시기를 결정하고 반입에 따른

위험이 있는 장소에는 적절한 안전설비를 하여야 한다.

아. 현장관리

1) 계약상대자는 현장에 물품 반입 및 설치 시 안전사고 예방을 위하여 안전관리책임자(현장대리인)를 선정 발주기관에

보고 후 현장 배치하여야 한다.

2) 계약상대자는 작업 시 철도이용객에 불편함이 없도록 작업현장을 보양한 후 작업을 하여야 하며, 보양계획을

수립하여 발주기관에 보고 후 작업 하여야 한다.

3) 작업 중 , 후 작업구역을 항시 깨끗이 하고 작업완료 시 즉시 청소 및 공기구, 폐자재 등을 정리하여야 하며 민원

발생이 없도록 한다.

4) 현장 대리인, 시공 기술자, 현장요원 등은 공사감독자의 승인 없이 현장을 이탈하지 못하며, 공사감독자의 정당한 지시 및 명령에 불응하거나 공사수행 능력이 없다고 인정 될 때에는 공사감독자는 계약당사자에게 당해 인원의 교체를 요구할 수 있으며, 공사감독자의 요청이 있을 때에는 계약당사자는 즉시 교체하고 그 결과를 보고하여야 한다.

4. 관계처 협의

관계 법령에 의한 각종 인, 허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 공사감독자의 지시에 따라 사전확인 이행하여야 하며,

이에 소요되는 경비는 계약당사자 부담으로 한다.

5. 설계도서의 해석

본 공사 설계도서의 해석에 관하여 공사감독자와 계약자간에 이견이 있을시 공사감독자의 해석이 우선한다.

6. 품질관리

가. 본 공사 시행에 따른 주요부품 및 재료에 대한 납품서 또는 영수증에 수량을 기입하여 공사감독자에게 제출하여야 하며, 계약자는 물품 반입 전에 다음의 자료를 제출하여야 한다.

1) 각종 부품인증서(안전부품인정, 자율안전확인인증 등)

2) 각종 시험성적서(관리시험, 검사시험, 의뢰시험)

나. 도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때, 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때에는 공사감독자의 지시에 따르며, 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 공사감독자의 지시에 따라 시공한다.

다만, 현장대리인은 중요한 사항에 대하여 공사의 범위 내에서 공사감독자와 협의하여 시행 할 수 있으며, 설계변경이나 준공증감을 하여야 한다.

다. 계약당사자는 본 공사시행에 따라 지상 또는 지하의 공공시설물 및 개인재산에 손상이 없도록 공사시행 전에 사전조사를 철저히 하여야 하며, 손상이 발생하였을 때에는 즉시 공사감독자에게 보고 후 적절한 조치를 취하여야 하고, 계약당사자 부담으로 이를 보수 또는 변상하여야 한다.

라. 공사시공에 있어서 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기설치 및 위치변경 또는 공법으로 다소 변경하는 등의

경미한 사항을 감독자의 지시에 따라 계약당사자의 책임하에 시공하여야 한다.

마. 작업 중 전기안전에 유의하여야 하며 작업자 이외에 타인이 조작할 수 없도록 경고문을 부착하여야 하며, 화재예방을 위해 작업 중 흡연을 금하고, 소화기를 비치하여 화재에 대비하여야 한다.

바. 승객의 통행 및 열차운행에 지장이 없도록 장비, 기구, 자재 등을 지정된 장소에 보관하여야 한다.

7. 공사준공

가. 계약당사자는 우리공사의 준공검사를 받아야 한다.

나. 모든 검사에 소요되는 자재와 인력은 계약당사자 부담으로 한다.

다. 준공검사 후에는 각종 설계도서 및 시험성적서, 검사증 등을 제출하고 시설물을 인계하여야 한다.

라. 준공검사 시 검사자에 지적된 사항에 대하여 계약당사자는 지체없이 보완하고 이름 검사자 및 공사감독자에게 보고하여야 한다.

마. 제출서류

1) 준공사진첩, 부품 품질확인서, 제품상세도, 현장설치사진(반입검사 포함)

2) 부품의 성능 및 품질보증을 위한 시험성적서, 부품확인서, 인증서 등

8. 야간 공사

작업 진행 중 주간작업이 위험하다고 판단되는 공사를 시행할 경우 공사감독자와 협의 후『철도운행선로 지장작업 업무

지침』에 따라 야간에 안전하게 작업하여야 한다.

9. 뒷정리

본 공사 사용자재는 공사감독자 지정 장소에 항상 정리정돈하여야 하며, 본 공사로 인하여 발생된  공사폐자재 및 오물은

준공 전에 깨끗이 청소 및 반출하고, 정리정돈 하여야 한다.

10. 설계변경 조건

1) 공사현장의 상태 및 현장조건의 변동으로 인한 물량 변동이 있을 때

2) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순이 인정될 때

3) 천재지변 등의 부득이한 사유가 발생될 때

4) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

11. 하자보수보증금

계약상대자는 준공검사를 한 날로부터 (3)년간 그 공사의 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의 (3)에 해당하는

금액을 준공검사 후 그 공사대가의 지출 시까지 「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」제62조의 규정에 정한

바에 따라 하자보수보증금을 계약담당자에게 납부하여야 한다.

12. 감액 또는 환불

가. 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역 중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 노임단가 기준보다

과다하게 책정되었거나 제 잡비 적용에 착오가 있음이 계약 체결 후라도 발견되어 우리 공사로부터 감액 또는 환불 요구가

있을 때는 이의 없이 수락하여야 한다.

나. 전 항의 감액 또는 환불 해당액은 공사가 계약자에게 지불할 여하한 기성고 지급금액 중에서도 차인 할 수 있으며 또한 기성고 지급분이 없을 경우에는 공사가 정한 소정 기일까지 납부하여야 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1. 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수

가. 적용범위

1) 본 시방서에 명기되지 아니한 사항이나 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 행정안전부 장관이 고시한 승강기 검사기준에 적합하게 시공함과 동시에 감독자의 지시에 따라야 한다.

2) 본 시방서 이외의 공사 진행 중 문서에 의한 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

나. 적용기준

1) 본 시방서와 관련되는 모든 기준은 특기가 없는 한 K.S기준(KC인증부품)을 적용하는 것을 원칙으로 하며, K.S

기준에 없거나 공사의 특수성 등으로 불가피하게 외국기준을 적용해야하는 경우에는 구조상, 기능상 본 공사에

적합해야 하며, 외국산을 사용할 경우는 K.S규격 이상의 기준으로 국가공인시험기관에서 시험하여 합격한 성적서가

첨부된 제품으로 사용하여야 한다.

2. 제출물

가. 부품 제작 공정표, 제작 도면, 설치 공정표, 동원인원 계획표, 현장대리인, 안전관리자 및 안전관리계획서

나. 품질보증서, 수시검사 합격증명서, 각종 증명서 및 시험성적서, 기타 필요사항

다.「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따른 자율안전확인 인증 제품을 적용 및 인증서

3. 부품교체 일반사항

가. 필요부품은 현장조사(기존 설치부품의 사양, 크기, 시공상태, 운행상태 등) 후 동종 및 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

나. 각부 교체 및 보수 품은 작업 후 정상기능을 원활히 수행하여야 한다.

다. 부품설치 및 보수는 승강기검사기준(행정안전부 고시 제2017-1호) 별표 3 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조에 부합

하여야 한다.

4. 작업준비

1) 공사 전 공사안내문을 제작 부착하여야 한다.

2) 안내문은 공사명, 목적, 기간, 시행처, 계약상대자(대표 및 현장대리인, 안전관리자 등) 비상연락처 등의 내용이 포함

되어야 한다.

5. 설치 세부사항

5.1 적용 기준

본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다

가. 승강기 검사기준[행정안전부 고시]

나. 한국산업규격(KS)

5.2 보조브레이크

가. 보조브레이크의 모든 장치는 승강기검사기준에 적합하도록 설치되며, 승강기 안전기준(에스컬레이터 역주행방지장치)에 준하여 설치하여야 한다.

나. 보조브레이크와 스텝의 구동 스프라켓 또는 벨트의 드럼 사이의 연결은 샤프트, 기어 휠, 다중체인 또는 2개 이상의 단일 체인으로 이뤄져야 한다. 마찰 구동 즉, 클러치로 이뤄진 연결은 허용되지 않는다.

다. 보조 브레이크 시스템은 제동부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터를 효과적인 감속에 의해 정지시키고 정지 상태를 유지할 수 있는 방법으로 설계되어야 한다. 감속도는 1m/s2 이하이어야 한다.

라. 보조 브레이크는 기계적(마찰) 형식이어야 한다.

마. 보조 브레이크 장치는 다음과 같은 기능을 갖추어야 한다.

1) 운행 중 정격속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 주브레이크가 작동하여 정지하고 1.4배를 초과하기 전에 추가

제동장치가 작동해야 한다.

2) 운행 중 혹은 대기(정지) 중이라도 초기 설정된 운행방향 또는 기동방향과 반대로 움직일 경우 주브레이크와

추가 제동장치가 작동하여 정지해야 한다.

바. 보조 브레이크는 정전 또는 안전회로가 차단된 경우에 승강기 안전검사기준(5.4.2.1.3.2)의 에스컬레이터 정지거리에 따른 정지조건이 유지되면 주 브레이크와 함께 작동될 수 있다. 그렇지 않다면 보조 브레이크 시스템과 주 브레이크

시스템의 동시 작동은 위 바 항에 조건하에서만 허용된다.

사. 보조브레이크는 에스컬레이터의 정비 및 보수에 지장이 없는 범위에서 견고하게 고정하여야 하며, 정비 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

아. 보조브레이크에는 스텝미싱 센서 등 그 기능을 검출하는 장치를 포함한다.

자. 특히 구동부가 더블모터에 의해 구동되는 방식은 작업자 공간 확보 및 유지보수·점검 편의를 위하여 보조브레이크 타입 중 폴래치 방식을 적용한다.(단, 설치·유지보수·점검에 지장이 없을 때는 감독자와 상의하여 변경이 가능하다.

6. 시운전 및 검사

1) 각 기기의 설치완료 후 각종 안전장치에 대한 작동시험을 시행하고, 공사감독자 입회하에 시운전을 완료하여야 한다.

2) 시운전에 따른 보완사항에 대하여 조치를 완료하고, 인수인계 하여야 한다.

3) 에스컬레이터의 승차감, 주행 중 이상 소음 및 이상 진동 여부를 확인하여야 한다.

4) 자체성능검사 및 고장에러 조치방법을 위하여 「역주행방지장치 보수점검요령 절차서」를 제출하여야 한다.

7. 각부 청소

부품교체 공사 시 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름떄를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이 없도록 한다.

8. 품질보증 및 하자보수

가. 본 시방서에 의하여 설치된 부품의 보증기간은 납품 완료후 3년간으로 한다. 이기간내에 발생한 제품불량, 설치불량 등에 기인한 하자에 대하여는 계약당사자가 모든 책임을 지며, 공사가 지정하는 기일내에 무상으로 교체하여야 한다.

나. 하자 보증기간 중 위 사유에 의하여 발생한 하자로 시행된 물품 교체 부분과 그 영향에 의하여 발생된 주변부의 장애, 하자에 의한 교체 부품은 교체 완료일부터 3년간 보증기간으로 한다.

※ 규격품으로 문제가 없다고 하더라도 조정작업 및 설치부품에 하자 또는 교체품으로 인한 안전사고가 발생되었을

경우 계약당사자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

Ⅳ. 예정공정표

공 사 명 : 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사

공사기간 : 착수일로부터 85일간

공 종	단위	수량	공 사 기 간(85일)
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	비고
총 공 정	식	1
1) 자재준비 및 부품발주	식	1
2) E/S 개량공사	식	1
3) 시운전 및 뒷정리	식	1

Ⅴ. 설계예산내역서

공사명 : 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사
	총 공 사 비
	1.	도급공사비	별 봉
	2.	지급 자재비 (당기조달품)
	3.	지급 자재비 (전년도 조달품)
	4.	지급 자재비 (증고품)
	5.	지급 자재비 (레미콘, 충용품)
	6.	철도공사제공 기계기구 사용료
	7.	철도공사 직원급
	8.	철도공사직원급 일반관리비
	9.	재료 일반 관리비
	10.	운송비
	11.	계약수수료
	12.	용역감독여비
	13.	준공검사여비

Ⅵ. 공종별 예산조서

공사 종류	규격	수량		단가	금액	기사
공사명 : 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사
1. 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사		식	1
가. 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량		대	70
2. 소 계
3. 공 급 가 액
4. 부가가치세	2+3의 10%
5. 합 계	2 + 3 + 4

Ⅵ. 공종별 예산조서

공사 종류	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		기사
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액

2019년도

공사코드 :

공사명 : 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사

설     계     도

(도면  17매)

한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

2019년도

공사코드 :

공사명 : 부산역 외 11개역 에스컬레이터 개량공사

내     역     서

한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장