2020년도

공 사 명 : 경춘선 가평역 등 11개역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사

공사코드 : KR-CDD-20-029

설    계    서

예산센터 : 5000251[동부-수탁(시설)-일반개량FC]

사업코드 : C41913[시설/역시설개량/급수및기계설비]

약정항목 : 51050251[(일반유지)수선유지비-공비]

세금구분 : V1(과세)

구매요청번호 :

예산담당자 : 조 현 석    (인)

목      차

1. 설 계 설 명 서
2. 공 사 시 방 서
3. 예 정 공 정 표
4. 설계예산내역서
5. 공종별예산조서
6. 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침
7. 건설기술자 현장 부재(이탈)에 대한 제재조치
8. 공사현장 안전점검시 불법하도급 여부 점검 내용
9. 사고ㆍ장애 발생시 구상제도 시행

1. 설 계 설 명 서

가. 공사명 : 경춘선 가평역 등 11개역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사

나. 위  치 : 가평역, 왕십리역, 보산역, 덕정역, 동두천중앙역, 지행역, 양주역, 구리역, 정자역, 죽전역, 수원시청역

다. 목  적 : 본 공사는 역사 편의시설인 에스컬레이터에 대하여 성능이 저하된 주요부품을 교체하여 이용승객의 안전사고를 예방하고, 승강기의 수명연장 및 정상기능을 확보하고자 함.

라. 공사개요

명 칭	수 량	단 위	공 사 대 상
에스컬레이터 스텝체인 교체	26	대	가평 1,4호기, 왕십리 13,14호기, 보산 5호기, 덕정 1,2,3호기, 동두천중앙 1,2,3,4,6호기, 지행 2,4호기, 양주 3,4호기, 구리 3,4호기 정자 7호기, 죽전 1,3,4호기, 수원시청 1,2,11호기
에스컬레이터 스텝롤러 교체	18	대	왕십리 13,14호기, 보산 5호기, 덕정 1,3호기, 동두천중앙 1,2,3,4호기, 지행 2,4호기, 양주 3,4호기, 구리 3,4호기, 죽전 1,3,4호기

마. 공사기간 : 착공일로부터 120일간

바. 입찰참가자격 : 건설산업기본법 시행령 제 7조에 의한 승강기설치공사업 등록 업체

2. 공 사 시 방 서

○ 일 반 시 방 서

본 공사는 하기 시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정,  『건축공사 표준시방서』 및 철도공사 『공사 및 용역 관리규정』, 행정안전부 고시 『승강기 안전관리법』 에 의거 시행하여야 한다.

1. 수급인 및 현장대리인 자격

가. 입찰참가자격 : 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 승강기설치공사업에 등록한 업체이어야 한다.

나. 현장대리인 : 건설산업기본법 시행령 제35조 2항에 의한 당해 기술 분야별 유자격자 이상인자로서, 다음에 해당되는 경력의 이상인 자로 현장에 상주시켜야한다.

1) 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자

2) 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가) 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자

나) 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리 업무에 3년 이상 종사한 자

2. 공사기록 사진 : 수급인 부담으로 아래와 같은 사진 촬영 후 사진첩을 작성하여 기성‧준공시 제출하여야 한다.

촬 영 구 분	규 격	수 량	종 류	비 고
착 공 전 사 진	120 × 80	각 1 부	칼 라	동일장소 또는 동일방향에서 촬영할 것
준 공 사 진	120 × 80	각 1 부	칼 라
주요 공정 사진	120 × 80	각 1 부	칼 라

※ 공사 시공중 매몰되는 주요 부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여 감독자(공사‧용역의 감독업무를 담당하는 직원 또는 건설사업관리기술자를 말한다. 이하 감독자)에게 제출하여야 한다.

3. 안전관리 : 본 공사 시행에 있어 안전관리에 각별히 유의하고 안전조치를 취해야 하며, 피해 발생시 원상복구 및 현장 내에서 발생한 사고에 대하여 민, 형사상 등의 일체의 책임을 수급인이 져야하며, 표준안전시방서를 따른다.

가. 책임자의 선임 : 안전관리자는 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 현장에 배치하여야 한다.

나. 안전관리자의 임무

1) 안전보건관리규정에서 정한 직무

2) 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입시 적격품 선정

3) 현장 안전교육 계획수립 및 시행

4) 현장순회점검 및 지도

5) 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립

다. 안전관리보고 : 안전관리자는 아래사항에 대한 실시계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전관리비 사용계획서를 작성후 감독자에게 제출하여 사용실적을 보고하여야 한다.

1) 안전 및 보건 교육

2) 작업장 안전관리

3) 작업장 보고관리

4) 사고조사 및 대책수립

5) 기타 안전 및 보고에 대한 사항

라. 안전상의 조치

1) 작업중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 및 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소

2) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치

3) 공사용 자재 및 기계기구류의 건축한계선내의 방치

4) 열차운행선 근접 공사시 안전확인 철저

5) 공사 시행중 발생한 각 종 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.

4. 설계서 해석 : 도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때나 명기가 없을시, 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 필히 시공해야 할 사항은 수급인 단독 시공을 금하고, 감독자와 충분히 협의후 결정하여야 하며, 중요도에 따라 설계변경이나 준공 증감을 하여야 한다.

5. 설계변경 조건 : 본 공사 시행중 다음과 같은 경우가 발생할 시에는 설계변경을 할 수 있다.

가. 계획 변경으로 인한 물량 변동이 있을 때

나. 현장 조건의 변동으로 인한 물량 차이가 발생할 때

다. 운반거리가 현장과 현저한 차이가 발생할 때

라. 기타 필요하다고 인정하는 경우

6. 경미한 변경 : 현장 마무리 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독자의 지시에 따른다.

7. 관계부서 협의 : 관계 법령(건축법 및 각종 시행령)에 의한 각종 인, 허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 확인후 이행하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

8. 공정 및 시공계획서

가. 공사 착공 전에 착공서류(착공계, 현장대리인계, 위임장, 재직증명서, 자격증 및 기타 증명서, 예정공정표, 각서, 도급내역서, 그 외 착공시 필요한 서류)를 감독자에게 제출하여 승인받아야 한다.

나. 세부 공정별 시공계획서 및 가설물, 비계발판, 공사용 기계기구 등의 시공설비, 창고 및 작업장 기타 용지사용에 대하여 시공 계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받는다.

다. 공정표에 변경이 생기는 경우에는 변경 공정표를 지체 없이 작성하고 감독자의 승인을 받는다.

9. 품질관리 : 본 공사 시행에 따른 도급자부담 주요 재료에 대한 납품서 또는 영수증(전자세금계산서)에 수량을 기입하여 감독자에게 제출하여야 하며, 동시에 아래사항에 대한 시험계획서를 현장에 비치하고 기성 및 준공 시 관계자료를 첨부하여 보고하여야 한다.

가. 품질시험(K마크 인증 등)

나. 각종시험성적서

10. 현장대리인은 감독자의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 감독자의 정당한 지시 및 명령에 불응하거나 공사수행 능력이 없다고 인정 될 때에는 감독자는 도급자에게 현장대리인의 교체를 요구할 수 있다.

11. 도급자는 본 공사 시행에 따라 지상 또는 지하의 공공시설물 및 개인재산에 손상이 없도록 공사 시행 전에 사전조사를 철저히 하여야 하며, 손상 발생 시 즉시 감독자에게 보고 후 적절한 조치를 취하여야 하고, 도급자 부담으로 이를 보수 또는 변상하여야 한다.

12. 공사시공에 있어서 마감 및 작업상태 등으로 인하여 기기설치 및 설비의 위치변경 또는 공법으로 다소 변경하는 등의 경미한 사항은 감독관의 지시에 따라 도급자의 책임하에 시공하여야 한다.

13. 작업 중 전기안전에 유의하여야 하며 작업자 이외에 타인이 조작할 수 없도록 경고문을 부착하여야 하며, 화재예방을 위해 작업 중 흡연을 금하고, 소화기를 2개 이상 비치하여 화재에 대비하여야 한다.

14. 승객의 통행 및 열차운행에 지장이 없도록 장비, 기구, 자재 등을 지정된 장소에 보관하여야 한다.

15. 준공

가. 도급자는 당 공사에 대해 준공검사를 받아야 한다.

나. 모든 공사에 소요되는 자재와 인력은 도급자 부담으로 한다.

다. 도급자는 준공 후 감독자 요구시 준공도면(A3, 2부)을 감독자에게 제출하여야 한다.

라. 준공검사 후에는 각종 설계도서 및 시험성적서, 검사증 등을 제출하고 시설물을 인계하여야 한다.

마. 준공검사

1) 공사기성은 입고자재를 포함하지 않으며 기설치 완료된 자재를 기준으로 한다.

2) 준공 검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

가) 계약 설계도서(시방서, 내역서, 설계도면)대로 시공되었는지 여부

나) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

다) 잔재 및 발생물 처리

바. 준공청소

1) 공사 완료 시에는 건물 내, 외의 정리정돈 및 청소를 완전히 한다.

2) 기기 및 각종설비는 재료특성에 적합하게 청소한다.

3) 기계 및 전기장비의 표면을 깨끗이 닦고 과다한 이물질을 제거한다.

4) 주변의 찌꺼기, 퇴적물, 얼룩 등을 제거하고 깨끗하게 청소한다.

16. 공사보험료 등 정산처리

가. 본 공사의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비, 환경보전비 등 법정 정산과목에 대해서는 준공 검사시 납입확인서, 지출영수증 등 관련 증빙서류를 제출하고 감독자의 검사를 받아야 한다.

나. 산업안전보건관리비 및 환경관리비 사용내역 제출

1) 안전관리비의 계상은 다음과 같다.

가) 수급인은 공사계획을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 공사비에 계상

나) 계상된 산업안전보건관리비는 다른 목적으로 사용 금지

다) 산업안전보건관리비의 계상 및 사용기준은 고용노동부 고시에 따름

2) 산업안전보건관리비의 사용내역은 다음과 같다.

가) 공사현장 내 노무자 안전을 위한 안전시설비(공사설계내역 및 표준품셈 명기사항은 제외)

나) 개인보호구 및 안전장구 구입비

다) 안전보건 교육 및 행사비 등

※ 수급인은 감독자에게 산업안전보건관리비 및 환경관리비 항목별 세부사용계획을 승인받아야 하며, 또한 사용내역 및

집행 영수증(전자세금계산서 포함) 사본 등 증빙서류를 제출하여야 하며, 그 결과에 따라 준공(기성)시 정산 처리한다.

※ 수급인이 제출한 증빙서류(전자세금계산서 등)가 허위로 작성되었을 경우, 사업계약 종료 이후라도 수급인이 환수를 요청하였을 때에는 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

다. 건설 재해예방

1) 계약자는 건설 재해방지를 위하여 산업안전보건법 제74조에 의거 국토교통부장관이 지정한 건설재해 예방 전문기관에서 건설현장 재해예방을 위해 월2회 이상의 정기 기술지도를 받아야 한다.

2) 계약자는 공사계약 체결후 14일 이내에 건설재해 예방 전문기관과 기술지도 계약을 체결하고 계약서를 제출하여야 하며, 공사 완료시 기술지도 완료 보고서를 제출하여야 한다.

3) 기술지도 비율은 표준안전관리비에서 계상하며, 기술지도계약을 체결하지 않은 수급인에게 동 시행령 60조에 따라 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있다.

17. 기타

가. 계약조건 : 한국철도공사 계약업무처리 시행세칙 세부기준 별표 34 공사계약 일반조건, 별표 35 공사계약 특수조건에 따른다.

나. 하자보수 보증금

계약자는 준공검사가 완료된 날로부터 (3)년간 하자보수 보증금으로 공사계약금액의 100분의( 3 )에 해당하는 금액을 준공검사 후 공사대가의 지불 시까지 수요기관에 현금 은행발행 자기수표 또는 기획재정부장관이 지정하는 상장 유가증권으로 납부하거나 건설공제조합보증서 또는 이행보증 보험 증권을 제출하여야 한다.

○ 특 기 시 방 서

1. 일반사항 : 본 시방은 철도역사 에스컬레이터 개량공사에 적용하며 승강기제조 및 관리에 관한 법률, 건축법 등에 관한 규정 규칙, 내선규정, 전기설비기술 기준령 등 관련법규에 적합하도록 하며 도급자는 공사에 소요되는 물자와 장비일체를 제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

가. 본도급자는 계약 후 현장 입지조건을 파악, 실측하여 기기 배치 및 환경조건 등을 감안한 상세도 및 공정표를 감독관 사전협의, 승인을 득한 후 그 지시에 따른다.

나. 도급자는 착공 전 공사 참여기술자를 선정하여 감독관에게 제출 후 현장작업에 임하여야 하며 현장대리인은 매일 공정에 대한 작업사항, 인원, 자재반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 하며 공사일보에 기입 후 제출하여야 한다.

2. 사용자재 승인 및 기기의 검사

가. 본 시방의 스텝체인은 승강기 안전관리법 제11조 규정에 따라 안전인증을 받은 "디딤판체인(스텝체인)"제품을 지칭하며, 자재승인 서류 제출시 관련 인증서를 제출하고 반드시 인증품을 설치하여야 한다.

나. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 K인증품을 사용하여야 하며 K인증품이 없는 것은 품질보증 및 시험성적서에 적합한 신품을 사용하여야 한다.

다. 기타 사용될 자재도 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이 어려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체지시를 할 수 있으며, 관계기관의 시험을 필하고 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

라. 도급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험 및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야 하며 이에 소용되는 일체의 비용은 도급자 부담으로 하여야 한다.

마. 각 공사부분의 공정이 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때는 반드시 감독관의 시공검사를 받아야 하며 검사를 받지 않고 시공한 부분은 감독관의 지시에 의해 도급자 부담으로 재시공하여야 하며, 시공 후 검사가 곤란한 부분은 반드시 감독관 입회하에 시공하고 사진촬영을 하여야 한다.

3. 공사 주요 내역

공사내용	대 상	규 격	단 위	수 량	비 고
E/S 스텝체인 교체	가평 1,4호기, 덕정 1,2,3호기, 양주 3,4호기, 구리 3,4호기, 정자 7호기, 죽전 1,3,4호기	WBB-19T, 1200형	step	1,220	해당 규격품 또는 동등품 이상 사용
	왕십리 13,14호기	KCN-22T, 1200형	step	224
	동두천중앙 1~4,6호기, 지행 2,4호기	TL133-19T, 800형	step	642
	보산 5호기	TL133-19T, 1200형	step	69
	수원시청 1,2,11호기	TL133-28T, 1200형	step	565
E/S 스텝롤러 교체	왕십리 13,14호기, 보산 4호기, 덕정 1,3호기, 동두천중앙 1~4호기, 지행 2,4호기, 양주 3,4호기, 구리 3,4호기, 죽전 1,3,4호기,	외경(70~80)* 내경(25~30)	ea	3,810	해당 규격품 또는 동등품 이상 사용

* 스텝체인 교체분(E/S 26대)은 주행로 청소 병행(폐기물처리 포함)

4. 스텝체인 교체

가. 스텝체인은 자율안전확인 안전기준 부속서 63(국가기술표준원 고시)에 적합하거나 동등 이상 이어야 한다.

나. 스텝체인 및 롤러류는 한국승강기안전공단 및 KTL(한국산업기술시험원)의 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

다. 반드시 작업 전 현장 조사를 시행하여 현장에 설치된 규격을 확인하여야 하며, 설치되는 자재는 기존 설치품과 동등 이상의 재질(관련 증빙자료 제출)을 설치하도록 한다.

라. 감독자가 지정한 기일내 관련도면 및 예정공정표를 제출하여 승인받아야 한다.

마. 스텝체인 하중은 충격에 견딜 수 있도록 충분한 강도를 가진 재질을 사용하여야 한다.

바. 체인의 방청을 철저히 하여 부식이 발생하지 않도록 하며, 각 부품이 조립되는 AXLE 부위에는 GREASE를 도포한 후 조립한다.

사. 스탭체인의 핀은 절삭시 홈부의 면취작업 및 R가공하지 말아야 하며,  한번 사용한 STOP RING은 다시 재사용 하지않아야 한다.

아. 스텝 체인, 스텝 및  원형레일 등 각 부품을 정확하게 조립하고 조립후 장력을 조정하여 그 성능을 정상적으로 발휘할 수 있도록 하여야 조치하여야 한다.

자. 스텝체인 샤프트는 속이 찬 환봉으로 일체형으로 제작되어야 한다.

차. 스텝 철거,설치시 트레드 및 라이저부에 찍힘이 없도록 주의하고, 보관시 적재를 견고히 하여 파손되지 않도록 한다.

타. 체인 설치 후 상호간에 꺾임이 원활하여야 하며, 작동 시 이상마찰 및 마모부분이 없어야 한다.

파. 스텝체인롤러는 롤러 수명시험(자율안전확인 안전기준 부속서)에 합격한 부품을 사용하도록 하며, 교체 작업 전 스텝체인롤러 부품을 발주처에 제공하여 분해 및 구성품을 확인 및 승인 후 교체 작업을 시행하도록 한다.

하. 스텝체인 교체 시 에스컬레이터 주행로를 청소 시행하도록 하며, 청소 시행 시 주변 작업장 바닥에는 시트 등을 깔아 바닥의 오염을 방지하도록 한다. (청소 시행 후 발생된 폐기물은 일괄 처리하도록 하며, 발생된 비용은 도급자 부담으로 한다.)

5. 스텝롤러 교체

가. 스텝롤러는 KS B6896에 적합하거나 동등 이상이어야 하며 안전성과 정밀성이 확보되어야 한다.

나. 스텝텝롤러 교체 전 롤러의 변형 및 균열 등 부품의 외관 상태를 감독자와 육안검사 시행하도록 한다.

다. 스텝롤러 교체 후 구동이 원활하여야 하며, 작동 시 스텝롤러로 인한 소음이나 진동이 없도록 한다.

6. 시운전

가. 에스컬레이터에 대한 자체검사 기준에 따라 점검하여 시운전 후 감독자에게 제출한 후 당사가 정하는 준공검사를 받아야 한다.

나. 준공검사 시 현재 당사에서 시행중인 승강기 점검보수 용역 업체를 입회하여 시행할 수 있다.

다. 보수공사가 행해지는 각 부는 작업 후 청결히 청소하여야 한다.

라. 충분한 기간 동안 시운전을 시행하여야 하며, 준공검사 시 보완사항이 발생할 경우 즉시 조치하여야 한다.

3. 예 정 공 정 표

건 명 : 경춘선 가평역 등 11개역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사

공 사 종 류	단위	수량	공 사 기 간 (일)				비 고
			30	60	90	120
총 공 정	일	120
스텝체인 및 스텝롤러 제작	일	60
스텝체인 및 스텝롤러 교체	일	60

4. 설 계 예 산 내 역 서

공사명 : 경춘선 가평역 등 11개역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사

총 공 사 비
1.	도 급 공 사 비	-
2.	사급 자재비 (당기조달품)	-
3.	사급 자재비 (전년도 조달품)	-
4.	사급 자재비 (중고품)	-
5.	사급 자재비 (레미콘, 충용품)	-
6.	공사제공 기계기구 사용료	-
7.	직 원 급	-
8.	직원급 일반관리비	-
9.	재료 일반 관리비	-
10.	운 송 비	-
11.	입 찰 수 수 료	-
12.	공 사 감 독 여 비	-
13.	준 공 검 사 여 비	-

5. 공 종 별 예 산 조 서

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비
		간 접 재 료 비
		작업설, 부산물(△)
		[ 소 계 ]
	노 무 비	직 접 노 무 비
		간 접 노 무 비		직접노무비 * 8.00%
		[ 소 계 ]
	경 비	운 반 비
		기 계 경 비
		산 재 보 험 료		노무비 * 3.73%
		고 용 보 험 료		노무비 * 0.87%
		국민건강보험료		직접노무비 * 3.335%
		국민연금보험료		직접노무비 * 4.50%
		노인장기요양보험료		건강보험료 * 10.25%
		퇴직공제부금비		직접노무비 * 2.30%
		산 업 안 전 관 리 비		(재료비+직노) * 1.86%+5,349,000원
		안전관리자
		환 경 보 전 비		(재료비+직노+기계경비) * 0.3%
		기 타 경 비		(재료비+노무비) * 5.6%
		[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비				계 * 6%
이 윤				(노무비+경비+일반관리비) * 15%
건설 폐기물 처리비
공 급 가 액
부 가 가 치 세				공급가액 * 10%
총 공 사 비

6. 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침

제 1조 (목적) : 철도공사 현장의 시공 · 감리업체가 안전수칙 준수 불이행시 제재기준을 재정 · 시행하여 공사현장의 안전수칙 준수를 생활화하도록 유도함으로써 열차안전운행을 확보하고자 함.

제 2조 (용어의 정의)

가. “주관부서”라 함은 공사에 관한 계획, 사업관리 등의 업무를 주관하는 부서를 말한다.

나. “시행부서”라 함은 공사의 발주, 공정관리, 시공·설계, 감리관리 및 공사하자업무를 담당하는 지사의 해당팀 및 동업무 기술용역과 시설물을 유지·관리하는 현업사업소를 말한다.

다. “시공업자”라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 공사를 시공하는 자를 말한다.

라. "감리업자" 라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 시행부서장으로부터 공사의 감독권한을 위임받아 공사전반의 안전관리 및 작업감독을 하는 자를 말한다.

마. "점검자" 라 함은 주관부서, 시행부서와 철도공사의 다른 부서에서 시행하는 각종 점검을 시행하는 자를 말하며, 안전지도사를 포함한다.

바. "안전지도사"라 함은 철도공사 수송안전실 안전관리팀 소속 직원으로 현업소속 직원들의 안전에 관한 업무의 지도교육을 담당하는 자를 말한다.

제 3조 (적용범위) : 철도공사에서 시행하는 모든 공사에 적용한다.

제 4조 (현장점검)

가. 철도공사 현장의 안전확보를 위해 다음 각 호와 같이 정기 또는 특별점검을 시행한다.

1) 본사 및 지사에서 시행하는 정기안전점검

2) 본사 및 지사에서 시행하는 특별점검

3) 안전지도사 활동

나. 점검자가 공사현장 점검시에는 반드시 시공·감리업체 관계자 또는 지원업무수행자를 입회시켜 점검한다.

다. 점검결과 지적사항에 대하여는 시정지시서를 발부하여 시공·감리업체 관계자 또는 지원업무수행자에게 확인(날인)을 받은 후 교부하여야 한다.

라. 점검자가 점검결과 발부한 시정지시서에 대하여 시공·감리업체 관계자 또는 지원업무수행자가 확인(날인)을 거부하는 경우에는 사진촬영 등 증빙자료를 첨부하여야 한다.

마. 점검시 점검자는 단속·점검방문일지 또는 공사일지에 직·성명, 점검사유 등을 기록하여야 한다.

제 5조 (점검시 주요 행정조치 대상) : 공사현장 점검시 주요 행정조치 대상은 다음 각 호와 같다.

가. 인근역장과 운전협의를 하지 않은 경우

나. 작업시작 전 작업자 안전교육을 시행하지 않은 경우

다. 열차감시원을 배치하지 않고 작업하는 경우

라. 공사현장에 감독자가 입회감독을 하지 않는 경우

마. 공사현장에 안전설비를 하지 않고 작업을 하는 경우

바. 기타 승인을 받지 않거나 승인시간 이전에 작업을 시행하는 경우 등

제 6조 (점검결과에 대한 조치)

가. 공사현장을 점검한 점검자(소속)는 점검결과를 공사발주 소속인 시행부서에 통보하여야 한다.

나. 시공 · 감리업자 및 지원업무수행자는 점검자(소속)로부터 교부받은 시정지시서에 대하여 즉시 조치하고, 조치결과를(계획)을 6일이내에 시행부서장에게 보고하여야 한다.

다. 시행부서의 장은 현장의 시정조치 사항을 주관부서 및 점검소속에 보고하여야 한다.

제 7조(업체에 대한 조치)

가. 점검자(소속)로부터 제5조제1항에 해당하는 점검결과를 통보 받은 시행부서의 장은 관련 시공 · 감리업자에 대하여 다음 각호와 같이 행정조치를 하여야 한다.

1) 1회 지적시 : 시정조치 및 관련 시공·감리업체에 통보

2) 2회 지적시 : 시공·감리업체, 건설기술자, 감리원에 대하여 서면경고 및 안전관리 이행각서 징구

3) 3회 지적시 : 현장대리인, 감리원 등 교체 또는 시공·감리업체, 현장대리인, 감리원 등에 대한 부실벌점 부과

나. 시행부서의 장이 업체에 대해 부실벌점을 부과할 경우는 건설기술관리법 등 관계법령에 의거 부실정도에 따라 벌점을 부과하여야 한다.

다. 시행부서의 장은 동조 제1항 제3호의 조치시 그 결과를 주관부서장에게 보고하여야 한다.

제 8조(업체에 대한 관리)

가. 주관부서의 장은 지적업체에 대한 조치결과를 업체별로 별도 관리를 하여야 한다.

나. 시행부서의 장은 업체별 처분결과를 누적관리하면서 재 지적될 때마다 주관부서의 장과 협의, 가중조치를 하도록 하여야 한다.

다. 시행부서의 장은 벌점부과시 주관부서 및 건설협회 등 관련기관에 통보하여야 한다.

제 9조(사고유발 업체에 대한 조치)

가. 사고를 야기한 시공 · 감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설기술관리법, 전력기술관리법 등 관계법령에 따라 시행부서의 장이 행정제재 조치를 하여야 한다.

나. 시공 · 감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대한 행정제재 조치 결과는 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.

제 10조(안전관리 우수업체 대한 조치)

가. 시행부서의 장은 다음 각호에 해당하는 업체에 대하여 주관부서의 장에게 철도공사장 표창을 상신할 수 있다.

1) 공사현장 안전관리가 우수하고, 재해(사고)가 발생하지 않을 경우

2) 안전관리에 대한 관심과 조치한 실적이 높을 경우

나. 표창을 추천할 경우에는 제3자가 인정하는 공적이 있다고 판단될 때 표창심의위원회 심의를 거쳐 표창할 수 있다.

다. 표창을 수여 받은 시공 · 감리업체에 대하여는 각종 점검시 지적한 횟수를 다음 각 호에 의해 감경할 수 있다.

1) 1회 표창 수여시 : 1회

2) 2회 표창 수여시 : 전부

제 11조(적용기간 및 기간종료 후 조치)

가. 본 지침은 매년 1월1일부터 12월31일까지 1년 단위로 관리기간을 적용하고, 각종 공사계약 단위별로 관리한다.

나. 한국철도공사와 계약되어 있는 공사가 준공되면 이 지침에 의한 시공 · 감리업체에 대한 관리자료는 삭제한다.

제 12조(기타사항) : 시공 · 감리업체에 대한 행정조치를 시행함에 이 지침에 규정되지 않은 사항은 건설관계 법령과 한국철도공사 관련규정 및 지시에 따른다.

7. 건설기술자 현장 부재(이탈)에 대한 제재조치

○ 수급인은 단일 현장 작업시행을 원칙으로 하고, 부득이 공사현장이 분산되어 시행할 경우, 작업장 단위로 시공사 책임자 (현장대리인 또는 발주기관이 지정한자)와 철도운행안전관리자(운행선 또는 운행선 인접작업의 경우)가 반드시 상주하여야 함

○ 현장대리인 및 안전관리자가 현장 이탈시는 감독자 승인을 득하고, 감독자는 승인기록부에  승인여부 기록 유지

건설기술자 현장부재 승인 기록부
공사번호	공사명	공사기간	관련자(직,성명)	부재일시(기간)	부재사유	업무 대행자	감독자 확인

○ 열차운행선(인접) 작업을 관제센터, 역, 감독자 등 승인 없이 무단 작업시 업체 제재

- 열차운행선(인접) 작업시 단독작업 금지 및 위반사항 적발시 관련자는 작업현장 출입금지 조치

- 승인 없이 무단 작업시 전면 작업중지 및 현장대리인 교체

- 감독자 승인 없이 현장이탈시 과태료 부과 등 관련자 제재 조치

- 열차운행선 인접공사 안전관리계획서 작성 교육시행

8. 공사현장 안전점검시 불법하도급 여부 점검 내용

가. 현장대리인 및 안전관리자 업체 재직 내용 확인        나. 건설기술인협회 등록내용, 재직증명서 및 본인 확인

다. 급여지급내용 및 은행통장                            라.  건강보험, 고용보험 등 각종 보험료 납부 증빙 서류 등

9. 사고․장애 발생시 구상제도 시행

○ 공사 시행 중 사고 ․ 장애 유발업체에 대하여는 열차지연료, 차량 및 시설물 피해 복구비 등 직접비에 한하여 구상, 사고, 장애 경중에 따라 업체 및 건설기술자 별도 제재

2020년도

공사코드 : KR-CDD-20-029

건 명 : 경춘선 가평역 등 11개역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사

설    계    서

한국철도공사 수도권동부본부장

2020년도

공사코드 : KR-CDD-20-029

건 명 : 경춘선 가평역 등 11개역 에스컬레이터 스텝체인 개량공사

설    계    도

한국철도공사 수도권동부본부 청량리건축사업소장