메트로센터 에스컬레이터 보수공사

공사 시방서

2020.04

대구광역시 중구청

제1장 일반사항

적용범위

메트로센터 에스컬레이터 보수공사 시방서	- -	D A T E	: 2020.03

본 시방서는 ‘메트로센터 에스컬레이터 보수공사 용역’에 설치하는 승객용 에스컬레이터 (노후된 자재 교체)에 대하여 적용한다.

본 시방서에 별도의 사항이 없는 경우 현장 동일 자재를 우선 하며, 제품 규격서에 준하여 적용하되, 에스컬레이터의 운영과 안전에 문제가 없도록 하여야 한다.

공사의 범위

본 공사의 범위는 아래와 같다.

엑셀체인 (E/S 12호기, 10호기)

핸드레일 (E/S 12호기 우측, 9호기 우측/좌측, 19호기 우측)

핸드레일 구동체인 (E/S 19호기 좌측)

운행 검사

에스컬레이터 보수공사 참가 자격

건설산업기본법 제8조 규정에 의한 승강기설치공사업을 등록한 대구 지역업체로 한다.

전력 및 용수 공급

공사 중 필요한 전력 및 용수는 필요시 협의에 의해 발주자가 제공한다.

현장 가설물 및 이용자 이동 통로

본 공사에 필요한 현장사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물은 발주자와 협의하여 가설한다.

본 공사를 알리기 위한 알림표시판은 각 에스컬레이터 앞에 안내 표지판을 부착하고 건물 이용자들의 안전과 이동에 불편함이 없도록 한다.

안전조치를 소홀히 하여 발생하는 모든 안전사고의 책임은 수급자에게 있다.

고시

에스컬레이터 보수공사에 관한 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 승강기 관련법규 및 승강기 검사기준에 적합하게 시공함과 동시에 발주자의 지시에 따라야 한다.

본 시방서에 누락된 점이 있더라도 수급자는 시방서가 의도한 바와 같은 완전한  에스컬레이터가 설치될 수 있도록 소요 자재를 충실히 공급하여야 한다.

공급될 기자재는 발주처 사전 승인을 득하며 필요시 안전에 중요한 부품은 반드시 시험 성적서 또는 인증기관 확인서(K.S인증)를 첨부하여 제출하여야 한다.

제출물 및 도면 승인

제출물

계약자는 계약체결 후 다음의 제출물을 제출하여 승인을 득한 후 제작 및 설치공사에 착수하여야 하며 그 시점은 아래와 같다.

증명서, 기술자료 및 견본 등은 계약체결일로부터 25일 이내

설치공정표, 동원인원계획표, 설치계획도, 자재반입계획서, 안전관리계획서 등은 착공일로부터 15일 이내

계약자는 승강기 교체작업일로부터 완료일까지 매주 작업공정 보고서를 제출하여야 한다.

계약자는 준공 시 준공서류를 제출하여야 한다.

도면승인

계약자는 현장을 답사하여 현장 여건에 맞는 설치도면을 작성한 후 발주자의 승인을 받아 제작하되 실측의 부실 등으로 발생하는 모든 문제는 계약자 부담으로 재차 실측 후 제작한다.

계약자는 자재 승인서 제출 시 제작공정표, 각종 시험 및 검사성적서, 보수공구 및 예비품 명세서 등을 발주자와 협의 후 제출한다.

계약자는 설치도서(각종시험 및 검사성적 등)를 발주자에 제출하기 전에 관련 승강기 전문 검사기관의 확인(날인)이 필요한 경우는 반드시 확인 받아야 한다.

도면변경

발주자는 필요한 경우 계약자가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가 제출을 요구할 수 있으며 도면을 수정하였을 경우 최종 승인도면을 작성하여 제출하여야 한다.

계약자는 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 동일한 절차에 따라 승인을 받아야 한다.

발주자는 도면승인 후 라도 경미한 사항의 변경은 계약자에게 요구할 수 있으며 중요한 사항의 변경은 양자 합의에 의한다.

시공계획서

설치 공정표 : 공사 계약일로부터 계산된 전체 공사 공정표와 1대당 시공기간(비 운행기간) 각 1부

일일 보고서(일일공사내용, 공정현황, 공사투입인원)

현장 기술자 관련

현장 대리인 및 안전관리자 선임계

안전관리 계획서

안전관리대책 수립사항

안전관리자 등의 현장인원 상주 사항

작업 시 안전 조치 사항

안전표지의 부착내용

안전진단 및 안전교육 내용

기타

준공서류

승인도면 최종분 3부

시험성적서 및 성능과 관련된 보조자료

기타 필요한 사항

품질 확인

법정 검사

수급자는 공사 착공과 동시에 필요한 관계관서 검사원의 수속(허가, 신고, 검사 등)을 대행하여 필하여야 하며, 상기 수속에 필요한 제경비는 수급자의 부담으로 하여야 하고, 진행서류 부분은 발주자에게 제출한다.

수급자는 발주자의 입회하에 제반시험에 합격하고, 필요시 검사기관의 검사를 필한 후 검사필증을 준공 시 제출하여야 납품설치가 완료된 것으로 한다.

수급자는 검사기관의 검사 시 입회하여야 한다.

안전관리

계약자는 산업안전보건법 등의 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며,  에스컬레이터의 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야한다.

화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기 사용 시는 반드시 소화기를 비치함은 물론 교체공사 중 발생될 수 있는 개구부에는 안전보호 장치를 반드시 설치하여 안전사고 예방에 적극 대처하여야 한다.

교체공사 중 기존 시설물을 고의 또는 과실로 훼손 시 즉각 원상복구 및 변상조치 하여야 한다.

수급자는 소음 및 분진발생 작업 시에는 사전에 발주처와 협의하여 시행 하여야한다.

운반 보관 및 폐자재 취급(처분)

외장부분은 비닐 보호테이프로 보양하여 현장에 반입 하여야 하며, 안내도면, 안내문 등에 의해 정해진 장소에 야적해야 한다.

폐자재에서 발생하는 고철류는 시공사에서 처리한다.

계약기간

본 공사의 기간은 계약일로부터 60일간으로 한다.