2020년도

공사코드 : KR-CDD-20-041

인    가 :  제2020-  호   2020년    월     일

건 명 : 중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

설    계    서

예 산  센 터 : 5000251(동부-수탁(시설)-일반개량FC)

단위사업코드 : C41913 (시설개량/시설/급수및기계설비)

약 정  항 목 : 51050251[(일반유지비)수선유지비-공비]

세 금  코 드 : V1

구매요청번호 : 2100022575

* 예산담당자 : 조 현 석     (인)

2020년도

공사코드 : KR-CDD-20-041

건 명 : 중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

설    계    서

한국철도공사 수도권동부본부장

목      차

1. 설 계 설 명 서
2. 공 사 시 방 서
3. 예 정 공 정 표
4. 설계예산내역서
5. 공종별예산조서
6. 건설기술자 현장 부재(이탈)에 대한 제재조치
7. 공사현장 안전점검시 불법하도급 여부 점검 내용
8. 사고ㆍ장애 발생시 구상제도 시행
9. 안전교육 직접 시행

1. 설 계 설 명 서

가. 건  명 : 중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

나. 위  치 : 중앙선 구리역 등 17개역

다. 목  적 : 본 공사는 에스컬레이터 운행 중 비정상적인 동작(역주행 또는 과속운전)이 발생할 경우 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 안전장치(보조브레이크)를 설치함으로써 안전사고를 미연에 방지하여 이용고객 안전을 보장하고자 함.

라. 공사 개요 : 총 97대

역 사	단 위	수 량	공 사 범 위
중앙선 구리역 등 17개역	대	97	보조브레이크 장치 설치 (구리,양정,도심,팔당,운길산,양수,신원,국수,아신,오빈,양평,용문,지평,가천대,태평,모란,이매)

마. 공사기간 : 착공 지정일로부터 180일간

2. 공 사 시 방 서

○ 일 반 시 방 서

본 공사는 하기 시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 「건축공사 표준 시방서」,「건축설비공사 표준 시방서」,「토목공사 표준 시방서」 (첨부생략)에 의거 시행하여야 한다.

1. 현장대리인

현장대리인은 승강기보수자격을 취득한 자로서 당해 기술분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 또는 당해 기술분야의

승강기자체검사 보수교육을 이수한자로서 같은 종류의 공사현장에 배치되어 3년 이상 수행한 자를 현장에 상주시켜

승강기공사의 제반공정관리 및 안전관리, 품질관리에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

2. 공사기록 사진

도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 원판과 함께 사진첩을 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.

촬 영 구 분	규 격	수 량	종 류	비 고
착 공 전 사 진	120 × 80	각 2 부	칼 라	동일장소 또는 동일방향 에서 촬영할 것
준 공 사 진	120 × 80	각 2 부	칼 라
주요 공정 사진	120 × 80	각 2 부	칼 라

3. 안전관리

본 공사 시행에 있어 제반 안전관리에 각별히 유의하고 아래와 같은 안전조치를 취해야 하며, 현장 내에서 발생한            제반 사고에 대하여는 민, 형사상 일체의 책임을 도급자가 져야한다.

가. 책임자 선임 : 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 안전관리자로서의 의무를 성실히 수행해야 한다.

(철도안전관리체계기술기준, 2017.12.29. 국토교통부고시 제0945호)

나. 안전관리자의 임무

1) 산업안전보건법에서 정한 직무

2) 법 제33조(유해하거나 위험한 기계•기구 등의 방호조치 등), 법 제34조(안전인증) 관련 기계, 기구, 설비 및 보호구 등의 구입 시 적격품의 선정

3) 현장 안전교육 계획수립 및 실시

4)  현장 순회점검 및 지도

5) 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립

다. 안전관리보고

안전관리자는 아래사항에 대한 실시설계서를 작성하여 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전관리비                사용계획서를 감독자에게 제출하고 사용실적을 사진과 영수증을 첨부하여 보고하여야 한다.

1) 안전, 보건교육

2) 작업장 안전관리

3) 작업장 보건관리

4) 사고조사 및 대책수립

5) 기타 안전, 보건에 대한사항

라. 안전상의 조치 : 다음 장소는 특히 위험방지 조치를 하여야 한다.

1) 작업 중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

2) 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소

3) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치

4) 공사용 자재 및 기계기구류 건축 한계선 내의 방치

5) 공사 시행중 발생한 각종 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.

4. 설계변경 조건

본 공사 시행 중 다음과 같은 경우가 발생할 시에는 설계변경을 할 수 있다.

가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

나. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

다. 새로운 기술·공법 등의 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

라. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

5. 관계처 협의

관계 법령(건축법, 도로법, 도시계획법 및 각종 시행령)에 의한 각종 인, 허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는

감독자의 지시에 따라 사전확인 이행하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

6. 설계서 해석

본 공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 계약자간에 이견이 있을시 감독자와의 충분한 협의를 통해 결정하여야 한다.

7. 품질관리

본 공사 시행에 따른 주요 을부담 재료에 대한 납품서 또는 영수증에 수량을 기입하여 감독자에게 제출하여야

하며, 동시에 아래 사항에 대한 시험계획서를 현장에 비치하여야 하고 기성, 준공 시 관련 자료를 첨부하여

보고하여야 한다.

가. 품질시험

나. 각종 시험성적서(관리시험, 검사시험, 의뢰시험)

8. 뒷정리

본 공사로 인하여 발생된 오물은 준공 전에 깨끗이 청소하여야 하며, 지급재 중 잔품은 감독자가 지정한 장소에

반납, 정리정돈 하여야 한다.

9. 준공도 및 준공원도

본 공사 준공도 및 준공원도를 감독자 지시에 따라 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.

10. 폐기물 처리

공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물관리는 폐기물관리법(제10조 제1항 제4호의 규정)에 의하여 적법하게 처리하고,

석면함유가 의심되는 자재(텍스, 스레이트, 밤라이트, 흡음재 등)를 철거할 경우 감독자에게 사전 통보 및 산업안전

보건법 제122조에 의거 적법하게 처리한다.

11. 야간 공사

야간할증이 명기된 품목과 주간작업이 위험하다고 판단되는 공사를 시행할 경우 감독자와 협의 후 『철도운행선로

지장작업 업무지침』 에 따라  안전하게 작업하여야 한다.

12. 가설물 설치

가. 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의

저장소 등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하거나 불연재료를 사용하고 소화기를 비치

하여야 한다.

나. 가설물 철거 후, 주위는 청결하게 원상복구 하여야 한다.

13. 시  공

명 칭	규 격	보조브레이크 규격	대 수		비 고
에스컬레이터	1200형	6m 이하	19	51	보조브레이크 설치 (총 97대)
		12m 이하	31
		14m 이하	1
	1000형	6m 이하	10	28
		12m 이하	18
		14m 이하	0
	800형	6m 이하	14	18
		12m 이하	4
		14m 이하	0

< 녹색 건설자재 우선 사용 반영 내용 >

가. 도급자는 녹색제품 정보시스템(www.greenproduct.go.kr) 및 조달청 나라장터 종합 쇼핑몰(http://shopping.g2b.go.kr/)의무적으로 접속하여 공사에 사용되는 자재중 녹색제품에 해당하는 물품이 있을 경우 녹색제품을 구매하여야 한다.

※ 상품에 다음과 같은 도안이 붙어있는 것만 녹색제품으로 인정됨

나. 본 공사에 사용하는 재료는 한국공업규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료 또는 감독자의 검사를 받아 합격한 제품을 사용하고, 설계도서에 명시되지 않은 재료는 친환경상품 사용을 우선으로 한다.

○ 표준안전 시방서

1. 안전관리 목표

안전관리는 인명의 사상과 장비·물자의 파괴 및 손실을 가져올 잠재적 위험 상태로부터 사고를 예방하여 임무를 안전하게 수행할 수 있도록 계획·편성·통제하고, 최종적으로 공사시행 시 무사고·무재해 현장을 실현하는 것을 그 목표로 한다.

2. 안전관리 조직·안전관계자 임무

2-1 일반사항

가. 시공자는 철도안전법, 산업안전관계법규(산업안전보건법, 산업안전재해보상법, 근로기준법 등) 및 동법 시행령의 제반규정과 의무사항을 준수한다.

나. 현장대리인 및 안전관리 종사자 또는 작업책임자는 작업원 및 공중(公衆)의 안전에 대한 보호책임이 있으므로 작업원 및 공중을 보호하기 위하여 충분한 보호·예방조치를 한다.

다. 시공자는 결국 안전사고 방지에 관한 모든 책임을 갖고 있으므로 본 설계서에 특별히 정하지 않은 사항이라도 안전유지를 위하여 포괄적이고 적극적인 대책을 수립한다.

2-2 안전관리 조직

가. 안전관리 조직은 종․횡적으로 원활하고 신속하게 업무가 전달되고 상호협조가 용이한 형태로 구성한다.

나. 안전관리 조직에는 공사현장에 종사하는 자는 모두 포함된다.

다. 안전관리 업무의 수행을 위한 조직은 안전보건관리책임자, 안전관리자, 안전담당자 등으로 구성한다.

2-3 안전관리 조직의 역할

가. 안전관리계획서에 따른 표준작업 이행 및 안전시공 여부를 확인 한다.

나. 안전관리계획서에 따른 안전교육을 실시한다.

다. 안전사고를 사전에 예방하기 위한 다음의 조치를 취한다.

1) 제반 유해 위험 요소의 제거

2) 계획적이고 체계적인 현장순찰 및 위험예지활동 전개

2-4 안전보건관리책임자

가. 안전보건관리책임자는 현장 안전관리업무를 총괄한다.

나. 공사에서 현장안전점검 시 입회하고 점검결과 지적사항을 시정하여야 한다.

다. 안전관리업무와 관련하여 발주처에 보고․제출하는 서류 등에 대한 책임이 있다.

라. 산업재해 예방계획 수립, 안전보건관리 규정의 작성 및 근로자의 안전․보건교육

마. 작업환경의 측정 및 점검, 개선한다.

바. 산업재해의 원인 조사 및 재발방지 대책을 수립한다.

사. 안전 보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부확인 한다.

아. 기타 근로자의 유해 위험 예방 조치를 시행한다.

2-5 안전관리자

가. 안전관리자는 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 산업안전보건 법규에서 정한 직무 및 공사 안전을 담당한다.

나. 작업자에 대한 안전교육 실시 및 작업현장 수시 순회점검을 시행한다.

다. 방호장치․기계․기구 및 설비 또는 보호구 구입 시 적격품을 선정한다.

라. 기타 안전에 관한 사항으로 고용노동부장관이 정한 사항을 준수하고 위험작업에 대한 교육을 시행한다.

마. 협의되지 않은 작업(무단작업)의 시행여부를 확인 및 제재하고 작업원의 산업안전수칙 숙지상태를 점검한다.

바. 작업원에 대한 안전교육은 안전교육일지에 기록하고 기타 안전관련 사항 조치 시 조치사항도 기록한다.

사. 선로 변 작업 시 작업원에게 열차운전시각을 주지시켜 열차안전운행을 도모하여야 한다.

아. 선로에 인접하여 작업 할 때는 작업원에게 안전모와 안전조끼를 착용시켜 기관사가 식별하기 용이하도록 하여야 한다.

자. 안전관리 종사자는 당해공사의 다음 사항을 특별히 점검한다.

1) 가설물 설치 등에 대한 안전성 및 작업 중단 또는 작업 종료 후의 상태

2) 복장 및 장구류

3) 일기예보 등 기상상태를 파악하여 우기에는 풍수해 예방개소 점검

4) 작업의 곤란성과 위험성에 대한 조치, 기타 작업원 및 공중안전에 필요한 모든 사항을 사전 조치

2-6 전기안전관리자(단전 필요 시)

가. 전기사령과 전차선로 급ㆍ단전을 협의 한다.

나. (단전 시) 전차선로 단전 확인 및 접지걸이 설치 후 작업책임자에게 통보 한다.

다. (급전 시) 작업책임자로부터 작업관계자 철수 확인 후 접지걸이를 철거 한다.

라. 전차선로가 급전된 상태에서 시행되는 작업은 열차운행선로지장작업 업무세칙 제11조에 의한 안전관리를 시행 한다.

2-7 안전담당자

가. 안전, 보건에 관련되는 안전장비를 구입하고 관리 한다.

나. 작업완료 후 현장정리 및 위험시설에 대한 안전조치 상태를 확인 한다.

다. 안전보호구 착용 상태를 확인하고 불량 상태를 시정 조치한다.

라. 작업장 정리정돈, 안전시설물 유지관리 등 작업환경 조성상태를 확인한다.

2-8 현장대리인

가. 현장대리인은 공사시공에 적합한 기술자격 소지자로 선임한다.

나. 현장대리인은 인력관리와 안전대책 관리각서를 제출하고 인계인수까지 현장에 상주하여야 한다

다. 작업원의 기능․지식․숙련도 등에 대하여 감독자가 부적격자로 판명하여 통보할 경우 현장대리인은 그 작업원을 즉시 교체 하여야한다.

라. 현장대리인이 부득이하게 현장을 이탈할 경우에는 공사감독자의 승인을 득하고 안전관리자에게 인계인수를 하여야 하며, 공사감독자의 승인 없이 현장을 이탈할 때에는 과태료 부과, 교체 등 관련자를 제재조치 할 수 있다.

마. 현장대리인은 작업 전반에 대한 안전관리 및 작업관리 업무를 총괄하여야 한다.

바. 현장대리인(안전관리자)은 작업시작 30분 전에 작업내용과 개인별 임무를 숙지토록 안전교육(작업특성에 맞는 안전작업계획서 작성 포함, 참여자 서명)을 시행하고 공사감독자 확인 후 작업을 시행한다.

사. 현장대리인은 매일 작업 전에 해당 작업에 대한 안전을 위하여 다음사항을 주지시킨다.

1) 작업의 목적과 범위 및 각 작업원의 담당 직무

2) 작업의 시행순서와 방법 및 작업지시서의 검토

3) 작업의 곤란성과 위험성에 대한 조치 등

아. 공사 착수 전 현장대리인은 참여기술자에 대한 교육을 4시간 이상 시행하고 작업시작 30분 전에는 작업내용과 개인별 임무 및 내용을 숙지토록 안전교육을 시행을 하여야 한다.

자. 기타 안전관리사항은 별도로 제공되는 안전관리계획서의 안전관리 세부사항을 준수한다.

2-9 열차감시원(열차감시 필요 시)

가. 열차감시원은 작업자에게 열차의 접근 여부를 알려주기 위한 기본 휴대품(열차시각표, 호루라기, 적·백 수신호기, 손전등, 단락동선 등)을 소지하고, 그 여부를 현장대리인에게 확인 받고 근무일지에 서명한다.

나. 열차감시원은 선로변 작업 시 작업 개소별로 배치하여 작업자가 열차에 접촉되지 않도록 열차접근 여부를 지속 확인 한다.

다. 열차감시원은 선로변 작업안전수칙을 준수하며 인근역과 연락상태를 유지한다.

라. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 사전에 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다.

마. 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우에는 열차감시원을 작업개소 만큼 배치하여 개소별로 열차를 감시토록 한다.

바. 열차감시업무를 할 때에는 선로에서 벗어나 선로변에서 감시하여야 하며, 본인의 안전관리에도 주의하여야 한다.

사. 열차감시원은 열차감시업무 이외의 다른 업무에 배치되어서는 안 되며, 휴대폰 사용이나 잡념으로 업무가 소홀해지지 않도록 특히 주의하여야 한다.

2-10 작업자

가. 작업자는 스스로의 안전에 대한 궁극적 책임이 본인에게 있으므로 각종 수칙의 준수는 물론 수칙에 명기되지 않은 사항이라도 특별한 경우에는 작업책임자와 협의하여 안전에 유의한다.

나. 작업자는 안전모․안전화 등 개인 안전장구를 착용하고 작업현장에 출입하여야 하며, 모든 작업도구 및 공구는 작업 전에 점검하여 완전한 것만을 사용한다.

다. 작업자는 작업도중에 음주행위를 하여서는 안 된다.

라. 작업자는 작업책임자의 지휘계통에 따라 작업지시를 준수함은 물론 독단적인 행동을 하지 않는다.

마. 작업자는 작업장을 무단으로 이탈하지 말고, 작업 중 통신 및 연락을 확실하게 한다.

바. 작업자는 작업 중 위해개소 발견 시 즉시 작업책임자에게 보고하고 안전조치를 취한다.

사. 작업자는 고소작업 시 안전대 및 안전고리를 확인하고, 감독자는 확인 후 작업지시를 해야 하며 자재 및 공구 등을 떨어뜨리지 않도록 한다.

아. 작업자는 현장작업 전에 주변정리를 한 후 작업에 임해야 한다.

3. 안전점검

3-1 안전검사

가. 발주자는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 안전에 관한 제반 관리 상태를 점검 또는 진단한다.

나. 점검․진단결과 미흡하거나 잘못된 사항이 있을 경우 시공자에게 해당공사의 일시중단을 요구하고 시공자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정한다.

3-2 안전점검

가. 일일점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다.

1) 전 작업장에 대한 점검 및 순찰을 시행

2) 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 실시

3) 주요점검 및 순찰내용은 다음사항을 확인

가) 음주 후 출근상태, 개인보호구 미착용자 및 복장불량자 즉시 지적 및 시정지시

나) 기타 작업장 내 불안전한 상태 및 불안전한 행동(선로무단횡단 등) 점검

다) 비상연락망 숙지 사항

4) 점검시행 후 다음과 같이 조치

가) 점검결과 점검기록부 비치 및 일일 결재

나) 점검 시 미비사항 및 지적사항은 현장에서 조치하고, 결재권자의 판단 및 결심을 요하는 사항은 안전관계자 협의 후 안전총괄 책임자에게 대책수립 보고

나. 정기점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다.

1) 전 작업장에 대하여 점검 및 순찰

2) 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행

3) 주요 위험개소를 합동으로 점검, 순찰하여 미비사항 및 개선사항 집중토의 후 개선사항을 결정

다. 특별점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다.

1) 필요하다고 인정되는 작업장에 대하여 점검 및 순찰

2) 점검실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행

3) 점검실시 시기는 안전조치상 필요하다고 인정될 때 시행

4) 주요점검 및 순찰내용

가) 특별히 점검 및 순찰이 필요하다고 인정되는 작업장

나) 호우, 대설, 태풍 등 천재지변에 의해 예상되는 위험지역 및 취약지구

4. 안전교육

4-1 안전교육목적

근로자가 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 안전의 중요성을 인식시키고 맡은 작업의 작업방법에 관한 지식․기능을 습득하도록 교육 및 훈련하여 작업에 대한 안전태도를 양성하며, 재해예방의 실질적인 효과를 거두는데 목적이 있다.

4-2 안전교육계획

가. 일일 안전교육은 매일 현장 투입 전 당해 공정에 대한 안전교육을 실시한다.

나. 정기 안전교육은 매월 2시간 이상(교육실시 일지작성)을 실시한다.

다. 수시교육은 매일 현장 투입 전 당해 공정에 대한 안전교육을 실시한다.

라. 특별교육은 유해 위험작업 투입 시 안전교육을 실시한다.

4-3 대상별 교육내용

가. 근로자 정기안전⋅보건교육

○ 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

○ 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항

○ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항

○ 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

나. 관리감독자 정기안전⋅보건교육

○ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항

○ 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항

○ 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항

○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

○ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항

○ 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

다. 채용 시의 교육 및 작업내용 변경 시의 교육

○ 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

○ 작업 개시 전 점검에 관한 사항

○ 정리정돈 및 청소에 관한 사항

○ 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

○ 물질안전보건자료에 관한 사항

○ 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

라. 안전보건관리책임자 교육내용

○ 관리책임자의 책임과 직무에 관한 사항

○ 산업안전보건법령 및 안전·보건조치에 관한 사항

○ 산업안전·보건정책에 관한 사항

○ 자율안전·보건관리에 관한 사항

마. 안전관리자 교육내용

○ 산업안전·보건법령에 관한 사항

○ 산업안전개론에 관한 사항

○ 인간공학 및 산업심리에 관한 사항

○ 안전교육방법에 관한 사항

○ 재해 발생 시 응급처치에 관한 사항

○ 안전점검·평가 및 재해 분석기법에 관한 사항

○ 안전기준 및 개인보호구 등 각 분야별 재해예방 실무에 관한 사항

○ 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 관한 사항

○ 작업환경 개선 등 산업위생 분야에 관한 사항(위생보호구 포함)

○ 무재해운동 추진기법 및 실무에 관한 사항

○ 그 밖에 안전관리자의 직무 향상을 위하여 필요한 사항

4-4 작업 도구·기구별 안전기준

○ 추락 위험 방지에 대한 안전작업 수칙

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) <개정 2019.12.26.>

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제48조(울타리의 설치)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제49조(조명의 유지)

○ 이동식 크레인의 안전작업 수칙

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조(탑승의 제한)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제147조(설계기준 준수)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제148조(안전밸브의 조정)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제149조(해지장치의 사용)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제150조(경사각의 제한)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제164조(고리걸이 훅 등의 안전계수)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제168조(변형되어 있는 훅·샤클 등의 사용금지 등)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제170조(링 등의 구비)

○ 충전전로 인근에서의 차량⋅기계장치 작업 수칙

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조(충전전로 인근에서의 차량·기계장치 작업)

5. 안전장구 확보

가. 안전보호구는 안전모, 안전화, 안전벨트, 보안경, 마스크, 귀마개, 안전장갑, 안전등 등을 확보한다.

나. 각종 안전보건 표지판은 무재해 기록판, 일반․건설․전기안전수칙, 위험표지를 확보한다.

다. 전기안전시설은 분전반 안전시설, 전격방지 장치를 설치한다.

6. 안전관리비 집행

가. 안전관리비의 계상은 다음과 같다.

1) 시공자는 공사계획을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 공사비에 계상

2) 계상된 산업안전보건관리비는 다른 목적으로 금지

3) 산업안전보건관리비의 계상 및 사용기준은 고용노동부 고시에 따름

나. 산업안전보건관리비의 사용내역은 다음과 같다.

1) 안전시설비(공사설계내역 및 표준품셈 명기사항은 제외)

2) 개인보호구 및 안전장구 구입비

3) 안전진단비, 안전보건 교육 및 행사비 등

7. 사고 발생 시 긴급조치 요령 및 보고계통

가. 작업 중 사고 발생 시 조치 및 보고 체계는 다음과 같다.

1) 철도교통사고 및 운행장애(관리장애 포함)보고 계통도는 ‘철도사고조사 및 피해구상 세칙 별표2에 따름

2) 사고 시 다음의 조치를 시행한다.

가) 사고 발생 시 사상자 우선 응급조치 및 관계자 외 사고현장 출입제한

나) 사고복구 계획에 따라 사고복구 작업시행

나. 즉시보고 사항은 다음과 같다.

1) 보고대상은 철도건설공사와 관련된 모든 사고(장애)

2) 보고방법은 전화, 팩스, 문자메시지 등 가능한 통신수단을 사용하여 사고발생 즉시 보고

다. 이상 징후 발생 시 대처요령은 다음과 같다.

1) 사고를 유발할 수 있다고 판단되는 이상 징후 발견 시 발견자 또는 공사현장의 장은 유․무선 전화 또는 문자정보서비스를 이용하여 관계 소속에 신속히 보고

2) 열차운행선 공사 시 열차를 긴급히 정차시킬 필요가 있을 때는 ‘비상전호’ 또는 운전취급규정 제269조(열차의 방호) 및 제271조(무선전화기 방호 시 조치)를 준용하여 우선 열차를 정차시키고 즉시 철도운영자에게  통보

3) 이상 징후를 보고 받은 관계 소속은 원인을 조사하여 대책방안을 수립시행

라. 정식보고는 감독자의 지시에 따른다.

마. 긴급복구는 지역본부장의 지시에 따라 시행한다.

8. 화재예방

가. 작업 전 화재예방을 위하여 화재예방 교육을 시행하고 소화기, 감시자 배치 등 충분한 조치를 취해야 한다(특히 지하구간 작업 시)

나. 작업에 사용되는 재료 중 인화물질을 반입 할 때에는 감독자의 확인을 받아야 한다.

다. 위험성평가의 위험요인에 추가하고 근로자 사전교육 시행 후 작업을 개시 한다.

라. 화재 발생 시 초동 진화가 가능토록 작업장소의 지정된 곳에 소화기를 비치하며, 진화장비 배치장소를 숙지하고 작업 전 사전 훈련을 한다.

마. 화재 발생 시 초동진화를 신속히 하기 위하여 화재대처용 마스크를 비치한다.

바. 작업 공정 중 발생할 수 있는 화재유발 요인을 사전에 검토하여야 한다.

9. 열차안전운행

9-1 안전관리 대책

가. 수급인은 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 산업안전보건법규 및 열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼에서 정한 안전을 담당하는 안전관리자를 선임하여 안전관리를 하여야 하며, 시공 중 발생되는 일체의 사고에 대하여 그 책임을 진다.

나. 수급인은 작업 전 감독자와 협의하여 안전계획을 수립하고, 산업재해(사상·사고)예방을 위한 안전교육(산업안전보건관계법령 및 안전수칙 등)을 실시하여야 한다.

다. 감독자는 안전관리계획서를 면밀히 검토하여 보완사항이 있을 경우 즉시 수급인에게 수정 보완토록 하여야 한다.

라. 안전관리요원은 작업 전에 현장종사원에게 필요한 안전교육을 실시하여야 하며, 안전관리일지를 비치·기록하고, 작업현장을 수시로 순회하여 안전사고 예방에 최선의 노력을 다하고 감독자에게 이상 유무를 보고하여야 한다.

마. 수급인은 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독자와 충분히 협의하여야 하며, 필요시 입회를 요구하여야 한다.

바. 공사현장에 투입되는 작업자는 작업시간 단축을 위하여 정해진 통로 이외의 곳으로 통행해서는 안 된다.

사. 현장대리인은 작업 전에 작업내용․시공방법 등을 작업원에게 명확히 지시하여 작업 중 사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 공구 및 공사재료의 사용에 대하여 명확한 지시를 하고 사용 직전에는 충분한 검사를 실시하여야 한다.

아. 공사시행 시 열차운행 및 기설 시설물에 지장을 주지 않도록 유의하고, 차량통행 및 순회자, 고객 등에 지장이 없도록 충분한 대책을 강구한다.

자. 철도선로 내 및 이에 접하여 작업을 할 때에는 열차감시원을 배치하여 열차접근 시 조기대피를 시키도록 하고 공사재료, 작업용 공구 등은 열차운행에 지장을 주지 않도록 관리하여야 한다.

차. 중량물 공사자재 운반작업이 선로횡단 및 호니카(트로리) 사용을 동반 시행하면 선로일시사용중지 시행계획을 감독자와 협의 작성․승인 하에 시행하고, 소정의 작업시간 내에 완료될 수 있도록 하여야 한다.

카. 열차감시원은 수급인이 작업순서, 작업내용, 작업방법, 열차시각, 열차운전사항 및 연락방법 등에 대한 교육을 사전에 충분히 시켜야 한다.

타. 모든 작업원은 안전조끼를 착용하여야 하며, 정해진 휴대품을 지참한 열차감시원을 고정으로 배치하여야 한다.

파. 열차운전에 관련된 공사를 할 경우에는 해당 역장 및 사업소장과 충분히 협의한 후 적절한 조치를 취하여야 한다.

하. 심신 미약자는 적합성 및 인성검사를 시행하여 건강상태 및 업무숙련도 등을 확인 후 적정 작업에 배치하여야 한다.

거. 공사감독자는 작업 전 열차운행협의를 하고 협의 전에 작업현장 투입을 금지하여야 하며, 열차운행상황에 맞는 특별교육 시행여부를 확인하고, 감독자 협의 없이 무단작업 시 공사 중지 및 제재를 요청하여야 한다.

너.  공사감독자는 차단작업 시 관제, 역 등의 승인 없이 작업하면 전면 작업 중지 및 현장대리인 교체를 요청하여야 한다.

더. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 미리 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다.

러. 터널, 운행선 근접 등 임시고정 시설물이 열차풍압, 열차진동으로 인하여 이완, 탈락이 되지 않도록 작업책임자 및 안전관리자가 확인한다.

머. 철도운행안전관리자는 차단승인 전 선로 내 진입 금지를 교육하고  열차감시원은 작업 종료 후 모든 작업원이 선로에서 철수 완료 시 까지 선로 내 방호를 시행 한다.

버. 주변 소음으로 인하여 열차 진입여부를 확인하지 못할 경우에는 작업자(2인 1조)간 상호 감시하며 작업 한다.

서. 본선으로 열차운행 시 큰 소음으로 인하여 장비열차 등의 진입을 확인하지 못할 경우를 대비하여 본선 열차운행 시에도 작업을 일시 중지한다.

어. 각 분야별 세부작업은 철도설계지침 및 편람을 적용 한다.

저. 작업 특성에 따른 필요한 안전대책은 안전계획서 작성 시 추가한다.

9-2 작업 단계별 안전관리방안

가. 작업시행 전 다음 사항을 확인한다.

1) 다음사항의 작업계획을 수립하고 확인한다.

가) 현장대리인은 공사시행감독자와 작업계획 사전 협의

나) 시공상세도에 따른 작업방법, 건설장비와 인원 동원계획 수립

다) 동원인원, 장비, 자재준비상태 확인

라) 작업시간 적정성 및 관계소속(관련역, 관련 사업소) 통보여부 확인

2) 작업계획에 따른 관련부처간 사전 협의하고 확인한다.

가) 시설물(설비) 철거설치 관련 해당 역장과 사전 업무협의

나) 철도운행안전협의서를 역과 협의 전 관련부서의 작업승인서 승인을 득한 후 운전취급역과 협의를 시행

다) 작업협의 전에는 선로 내 출입 및 준비작업 등 절대 금지, 위반 시 작업취소 조치

라) 주요장치 절체작업에 따른 차단시간확보 및 열차사이 일시사용중지

3) 안전책임자를 지정하여 작업내용 및 안전교육을 실시하고 확인한다.

가) 당일 작업할 내용, 작업시간, 작업방법설명 및 안전교육 실시

나) 전 작업원의 안전모, 안전화, 작업복 착용 생활화

다) 안전보호구 및 복장 착용 부적격자 현장 투입 제한

라) 작업 시행을 위한 안전교육 시행 전 안전관련 설비 및 안전보호구등을 점검확인하고 이를 기록 유지

마) 작업 전 장치별 공종별 금지사항 교육

4) 작업현장 준비 및 안전조치상태를 확인한다.

가) 열차감시원 배치 및 보호구와 휴대품(안전조끼, 안전모, 무선전화기, 운전시각표, 경보설비, 손전등, 적․백색기 적·백색등 등) 휴대

나) 보호설비 설치상태(안전망 등)

다) 굴착공사가 필요할 때에는 지하매설물(신호, 통신케이블 등) 사전조사 및 안전조치

나. 작업 시행 중에는 다음 사항을 확인한다.

1) 열차감시원에 대하여는 다음사항을 확인한다.

가) 감시원은 가능한 철도경험이 있는 자로 채용·근무토록 유도하여 이상사항 발생 시 신속히 대처(철도 무경험자는 교육 강화 및 특별관리)

나) 수시로 감시원의 근무상태, 안전수칙 이행여부, 기본 보호구와 휴대품 소지여부(안전조끼, 안전모, 무선전화기, 운전시각표, 경보설비, 적․백색기, 적․백색등 등) 휴대 확인하고 감시원 근무일지에 서명

다) 열차감시원의 배치는 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우 작업 개소 수만큼 배치하여 개소별로 열차를 감시

2) 건축한계 저촉여부 확인사항은 다음과 같다.

가) 열차 진입 시 모든 작업 중단

나) 장비작업으로 운행선에 지장우려 시 필히 차단공사 승인 후 시행

다) 작업반경 내의 작업원 및 선로와의 안전거리 확보 유무 수시 확인

3) 지하매설물(케이블, 관류 등) 발견 시 즉시 관계처에 통보(비상연락망 상시 소지)

4) 주변의 현지여건을 고려하여 무리한 작업 및 타성에 젖은 작업을 금지

5) 안전관리자는 다음사항에 대하여 매일 순회 점검을 실시하고 기록 유지한다.

가) 점검관리대장 기록 유지

나) 시정사항은 조치이행계획을 세부적으로 수립하고 이행결과 확인

다) 현장대리인은 점검사항 및 조치결과를 매일 확인

6) 안전한 시공 및 철도운행선 작업안전 확보를 위하여 다음사항을 준수한다.

가) 열차운행선 근접지역 및 정거장 구내 공사 시 ‘열차운행선로지장작업 업무세칙’ 등의 제규정에 따라 시행

나) 사용 자재 및 기계기구류는 열차운전에 위해를 주지 않도록 관리

다) 화약류·유류등의 인화물질을 사용할 경우 선로에 근접하여 보관금지

라)  공사 작업원에게 열차운전시각표를 주지시켜 열차안전운행을 확보

마) 선로에 인접하여 작업할 때는 작업원에게 안전모와 조끼를 착용하도록 하여 기관사가 식별이 용이하도록

바) 철도운행선에 공사관계자 외 외부인이 출입하지 못하도록 통제하고, 공사인력과 외부인이 구별되도록 공사인력은 안전보호구 및 작업복장 등을 통일되게 한다.

사) 현장대리인은 공사인력에 대하여 공사내용 및 열차운행사항 등 외부유출 시 열차안전에 저해가 될 수 있는 사항을 보안유지토록 교육하고 필요 시 보안각서를 징수한다.

다. 작업 시행 후에는 다음 사항을 확인한다.

1) 다음 항목으로 합동점검 시행한다.

가) 작업 완료 후 자재 등의 건축한계 및 안전 이격거리 확보여부 확인

나) 장비, 자재 및 공구류의 정리정돈 상태 확인

다) 작업 종료사항을 관계 역 및 사업소, 운전관제에 통보

2) 기기별 동작 및 기능상태 점검은 점검목록에 의한 규정상 기준치 적합여부를 확인

10. 현장 작업여건에 따른 안전보건상의 조치

10-1 안전보건 관리

가. 공사현장의 안전․보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체계를 구성하여야 하며, 안전수칙에 따라 작업 전에 교육 등을 통하여 재해방지에 필요한 주의사항을 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의한다.

나. 하도급 공사계약을 체결할 때는 고용노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다. 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용해서는 안 된다.

다. 인적․물적사고가 발생하였을 때에는 즉시 감독자 및 업무담당자에게 보고하고, 민·형사상의 모든 책임은 시공자가 진다.

라. 시공자는 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등의 발생으로 인해 부근 거주자 및 통행자에게 생명, 신체 및 재산상에 피해가 발생하거나 불편이 없도록 주의하여야 한다.

마. 시공자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독자 또는 업무담당자가 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금지한다.

바. 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감독자에게 승인을 받는다.

사. 시공자는 굴착공사 착수 전 지하 매설물에 대한 위치, 용량, 상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립한 후 공사를 착수한다.

아. 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 한다.

자. 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용한다.

차.  작업 전․중 음주행위를 금하고, 큰소리로 떠들거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 한다.

카. 위험한 작업의 경우에는 감시자를 배치하여 근접되지 않도록 하며, 감독자 입회하에 시공책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 한다.

타. 공사에 필요한 적재된 자재가 무너지지 않도록 안전하게 조치를 취한다.

10-2 보건상의 조치

가. 작업현장에서의 산업보건기준은 다음 사항을 준수한다.

1) 가스, 증기, 유해광선, 초음파, 소음, 진동, 이상기압, 병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선조치

2) 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고, 눈이 부시지 않게 법정수준으로 설치

3) 고․저온, 건조, 다습한 옥내작업 시는 냉·난방, 통풍 등 적절한 온·습도조절 조치

4) 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 구비

5) 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 비치장소와 사용방법을 근로자에게 통보

나. 작업환경측정은 다음 사항을 준수한다.

1) 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후 그 결과를 기록·보존

2) 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구

○ 특기시방서

1.  일반사항

가. 적용범위

본 시방은 『중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사』에 적용하며 승강기 안전관리법, 전기용품안전관리법, 건축법 시행규칙, 건축공사 표준시방서, 전기설비 기술기준령, 전기내선규정, ISO국제표준기구, 한국공업규격(KS)등에 관한 규정,규칙, 내선규정, 전기설비기술 기준령, 승강기 검사기준 등 관렵 법규에 적합하도록 하며 도급자는 공사에 소요되는 물자와 장비일체를 제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

1) 도급자는 계약 후 현장 입지조건을 파악, 실측하여 기기 배치 및 환경조건 등을 감안한 상세도 및 부품 발주 일정 등을 고려한 세부공정 계획을 수립하여 이를 기반으로 상세공정표를 제출하고 감독관 협의 및 승인을 득한다.

2) 도급자는 착공 전 공사 참여기술자를 선정하여 감독관에게 제출 후 현장작업에 임하여야 하며 현장대리인은 매일 공정에 대한 작업사항, 인원, 자재반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 하며 공사일보에 기입 후 제출하여야 한다.

나. 제반 법규의 준수

1) 계약자는 본 공사 시행과 관련되는 제반법규를 엄수 성실히 이행해야 한다.

다. 도면 · 사용자재 승인 및 기기의 검사

1) 작업착수 전 현장 실측 후 도면화하여 공사감독에게 제출 승인을 득한 후 작업을 하여야 한다.

2) 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제12조제5항 또는 제14조제2항에 따라 부품안전인증서를 발급받은 제품을 설치하여야 한다.

3) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS인증품을 사용하여야 하며 KS인증이 없는 것은 품질보증 및 시험성적서에 적합한 신품을 사용하여야 한다.

4) 본 공사에 사용될 주요자재는 공인기관 시험성적서가 필요한 품목에 대해서는 시험성적서와 함께 반입하고 자체 시험품목도 시험성적서를 제출하여야 한다.

5) 기타 사용될 자재도 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이 어려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체          지시를 할 수 있으며, 관계기관의 시험을 필하고 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

6) 도급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험 및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야           하며 이에 소용되는 일체의 비용은 도급자 부담으로 하여야 한다.

7) 각 공사부분의 공정이 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때는 반드시 감독관의 시공검사를 받아야 하며 검사를 받지  않고 시공한 부분은 감독관의 지시에 의해 도급자 부담으로 재시공하여야 하며, 시공 후 검사가 곤란한 부분은 반드시 감독관 입회하에 시공하고 사진촬영을 하여야 한다.

2. 공사 주요 내역

선 별	역 사	호기	종류	규 격	설치년도	제 조 사	개량대상	높이(M)
중앙선	구리	1	E/S	1200형	2005	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		4	E/S	1200형	2005	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	6
	양정	1	E/S	1200형	2005	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	7
		2	E/S	1200형	2005	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	7
	도심	1	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		2	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		3	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		4	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		5	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		6	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9

선 별	역 사	호기	종류	규 격	설치년도	제 조 사	개량대상	높이(M)
중앙선	도심	7	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		8	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	9
	팔당	1	E/S	800형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		2	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		3	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		4	E/S	800형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
	운길산	1	E/S	800형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		2	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		3	E/S	1200형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		4	E/S	800형	2007	동양엘리베이터	보조브레이크 설치	10
	양수	1	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		2	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		3	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		4	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		5	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		6	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		7	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		8	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	10
	신원	1	E/S	1200형	2009	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		2	E/S	1200형	2009	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		3	E/S	1200형	2009	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		4	E/S	1200형	2009	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5

선 별	역 사	호기	종류	규 격	설치년도	제 조 사	개량대상	높이(M)
중앙선	국수	1	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		2	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		3	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		4	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	6
	아신	1	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		2	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		3	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		4	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		5	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		6	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	6
	오빈	1	E/S	1000형	2010	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		2	E/S	1000형	2010	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		3	E/S	1000형	2010	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		4	E/S	1000형	2010	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	5
	양평	1	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		2	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		3	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		4	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		5	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		6	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		7	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		8	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8

선 별	역 사	호기	종류	규 격	설치년도	제 조 사	개량대상	높이(M)
중앙선	양평	9	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		10	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		11	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	6
		12	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	6
	용문	1	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		2	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		3	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	7
		4	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	7
		5	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		6	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		7	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		8	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	8
		9	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	7
		10	E/S	1000형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	7
		11	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	10
		12	E/S	1200형	2009	송산특수엘리베이터	보조브레이크 설치	10
	지평	1	E/S	800형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		2	E/S	800형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
분당선	가천대	2	E/S	1200형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	14
		5	E/S	1200형	2012	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	11
		6	E/S	1200형	2012	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		7	E/S	1200형	2012	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4

선 별	역 사	호기	종류	규 격	설치년도	제 조 사	개량대상	높이(M)
분당선	가천대	10	E/S	800형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		11	E/S	800형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		12	E/S	800형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		13	E/S	800형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
	태평	1	E/S	800형	2006	한국후지	보조브레이크 설치	4
		2	E/S	800형	2006	한국후지	보조브레이크 설치	4
		3	E/S	800형	2006	한국후지	보조브레이크 설치	4
		4	E/S	800형	2006	한국후지	보조브레이크 설치	4
	모란	2	E/S	1200형	2010	삼정엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		4	E/S	1200형	2010	삼정엘리베이터	보조브레이크 설치	9
		6	E/S	1000형	2011	삼정엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		8	E/S	1000형	2011	삼정엘리베이터	보조브레이크 설치	4
	이매	1	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		2	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	4
		4	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		5	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		6	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		7	E/S	800형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		8	E/S	800형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		9	E/S	800형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5
		10	E/S	800형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	5

2-1. 일반사항

가. 본 시방서에 규정하는 E/S 안전장치는 대량의 인원을 수송하는 도시 교통 특성에 적합하도록 높은 강도와 충분한 안정성 및 내구성이 보장되어야 한다.

나. 본 시방서에 따라 제작 되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을 고려하여 가능한 상호 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 한다.

다. 운행시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘 할 수 있도록 설계되어야 한다.

라. 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작, 설치하여야 한다.

마. 설치대상 기기는 발주처의 사정 및 현장상황에 따라 변경될 수 있으며, 도급자는 변경 내용에 대하여 적극 협조하여야 한다.

바. 시공 대상 외 관련 기기 및 기반시설에 대하여 이설 등 변경을 요할 경우 반드시 감독자의 승인을 득하여야 한다.

사. 작업 중 기타 제반시설에 손상을 입혔을 경우, 도급자 책임하에 시공 전과 동일 상태 이상으로 복구하여야 한다.

아. 준공시까지 향후 관련 유지보수를 위한 매뉴얼을 제공하여야 한다.

자. 구동축에 설치하는 경우 기존 구동부 등에 변형이나 손상 등으로 구동부의 내구성이나 안전율이 저하될 우려가 없는 제품으로 설치하여야 하며 내구성 및 안전율이 저하 될 우려가 있다고 감독관이 판단하는 경우 도급자는 시험 및 검사 등을 실시하여 제품 설치 시 내구성 및 안전율이 저하되지 않음을 국가 공인기관에서 증명해야 하며 이에 소요되는 일체의 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

차. 인증서에 기재된 제품특기사항 및 적용범위(구동축 안전율, 구동축 두께 및 직경, 층고, 적용하중, 정격속도, 경사각, 제동토크 등)는 설치대상 승강기와 적합한 제품으로 설치하여야 한다.

2-2. 제작기준

가. 본 시방에 보조브레이크는 구동체인 파단, 역행, 속도이상 발생 시 정지토록 하는 브레이크의 통칭(주브레이크의 보조 역할) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제3조의 규정에 따라 안전인증 대상전기용품 중 안전인증 되어 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조, 제10조 또는 제15조에 따라 안전인증서를 발급받은 “에스컬레이터 역주행방지장치” 또는 승강기 안전관리법 제11조 규정에 따라 안전인증을 받은 “과속역행방지장치” 제품을 지칭 한다.

나. 보조브레이크의 설치 계획은 향후 유지보수 작업(예. 제어반 이동 및 모터 반출, 체인 보수작업 등)을 위한 최소공간을 확보하여 배치되어야 한다.

다. 보조브레이크는 기계적(마찰)형식이어야 한다.

라. 보조브레이크는 다음과 같은 조건이 될 경우 신속하게 작동되어야 하며, 작동시 부품이 손상되지 않는 구조이어야 한다.

(1) 주전원 공급 차단

(2) 주구동 체인 이완 또는 파단

(3) 주브레이크 작동 불능

(4) 감속기 기어마모 등 구동스프라켓과 동력 분리 시

마. 보조브레이크는 다음과 같이 구성되어야 한다.

(1) 추가 제어장치 : 기존 브레이크 외에 별도의 제동장치를 설치하여야 하며, 감속에 의해 정지시키고 정지 상태를

유지할 수 있어야한다. 감속도는 1㎨ 이하여야 한다.

(2) 제어장치 : 과속, 역회전을 검출하고 향후 다른 기능을 추가 확장할 수 있는 충분한 입·출력 단자를 가져야한다.

감지기 신호를 처리하는 기판은 자율안전인증을 받은 안전회로기판을 사용하여 제어반을 제작해야한다.

(3) 검출센서 : 과속도 검출센서, 역주행전 검출센서 1개 이상으로 구성되며 CE(유럽) 또는 UL(미국) 인증을 받은 우수한 제품을 사용한다.

(4) 센서 고정 브라켓 : 금속재질(3T 이상)로 센서가 흔들리지 않도록 견고하게 제작하고 사전협의 후 진행한다.

(5) 추가 제어장치 외함 : 불연재질로 먼지, 습기, 발열 등을 방지할 수 있고 기기와 인체에 문제가 없도록 충분한 강도와 절연상태를 유지할 수 있는 구조로 제작하여 협소한 공간에 설치되더라도 향후 원활한 유지보수가 가능하도록 구분하여 현시되어야 하고 RESET을 위한 RESET 스위치를 설치해야 한다.

(6) 토크 조정부 : 향후 원활한 유지 보수를 위하여 토크 조정이 용이한 구조로 제작한다. (보조브레이크 설치 시 기본으로 설정된 토크치를 문서로 명시하여 제공하여야 한다.)

바. 장치는 다음과 같은 기능을 갖추어야 한다.

(1) 과속도 검출 : 운행 중 정격속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 주브레이크가 작동하여 정지하고 1.4배를 초과하기 전에 추가 제동장치가 작동해야 한다.

(2) 역회전 검출 : 운행 중 혹은 대기(정지) 중이라도 초기 설정된 운행방향 또는 기동방향과 반대로 움직일 경우 주    브레이크와 추가 제동장치가 작동하여 정지해야 한다.

(3) 센서고장 감시 : 센서의 고장을 감시하여 이상이 발생하면 주브레이크가 작동하고 정지해야 한다.

(4) 수동복귀  기능 : 이상발생(과속, 역회전, 센서이상, ERROR 등) 시 자동 복귀되지 않고 점검자가 확인하고 제어장치를 리셋 후 재가동될 회로를 구성해야 한다.

(5) 단전 후 급전 시 보조브레이크 감지스위치 자동통전으로 보조브레이크의 정상 기능을 복구하도록 구성하여야 한다.

사. 스텝유실 검출장치 설치

(1) 검출센서는 KS 인증을 받은 우수한 제품을 사용하여야 한다.

(2) 센서 고정 브라켓은 금속재질(3T 이상)로 센서가 흔들리지 않도록 견고하게 제작하고 사전협의 후 진행해야 한다.

(3) 스텝의 누락된 부분이 COMB에 나타나기 전에 검출하여 주브레이크를 작동시켜 정지해야 한다.

아. 관련 법규 개정에 따른 내용 변경 시 변경 법규를 따른다.

2-3 성능 시험

가. 수급인은 설치완료 후 안전장치 작동시험 및 에스컬레이터 정상 작동여부를 확인하여야 하며 필요시 발주처의 입회하에 실시한다.

나. 본 시방서에 명시하지 않은 사항이라도 성능 확인을 위하여 필요한 시험 및 검사를 요구할 수 있으며, 시험 방법 등은 발주처와 협의 후 진행한다.

다. 필요시 관련법에 의한 모든 시험 및 검사가 종료될 때까지 시공책임자로서의 소임을 다하여야 한다.

라. 준공기한 내에 설치 및 시운전을 완료하여야 하고, 현장대리인 및 공사감독자의 확인 서명한 시운전 보고서를 제출한다.

마. 준공검사 시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 계약상대자의 책임 하에 즉시 재시공 하여야 한다.

3. 예 정 공 정 표

건 명 : 중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

공 종	단 위	수 량
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
전 체	식	1
자재준비 및 부품발주	식	1
E/S 보조브레이크 설치	식	1
시운전 및 준공검사	식	1

4. 설 계 예 산 내 역 서

건 명 : 중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

총 공 사 비
1.	도 급 공 사 비	별 봉
2.	사급 자재비 (당기조달품)
3.	사급 자재비 (전년도 조달품)
4.	사급 자재비 (증고품)
5.	사급 자재비 (레미콘, 충용품)
6.	공사제공 기계기구 사용료
7.	직 원 급
8.	직원급 일반관리비
9.	재료 일반 관리비
10.	운 송 비
11.	입 찰 수 수 료
12.	공 사 감 독 여 비
13.	준 공 검 사 여 비

5. 공 종 별 예 산 조 서

비 목	구성비	비 율	단 위	금 액	비 고
1.순공사비 원가	가+나+다
가. 재료비
나. 노 무 비 계
나-1)직접노무비
나-2)간접노무비	나-1의*8.00%	8.00	%
다.경 비 계
다-1)산출경비
다-2)기타경비	(가+나)의*5.60%	5.60	%
다-3)산재보험료	나*3.73%	3.73	%
다-4)산업안전보건관리비	(가+나-1)의*1.86% + 5,349천원	1.86% + 5,349천원
다-5)환경보전비	(가+나-1+다-1)의*0.30%	0.30	%
다-6)고용보험료	나*0.87%	0.87	%
다-7)건강보험료	나-1의*3.335%	3.335	%
다-8)연금보험료	나-1*4.50%	4.50	%
다-9)노인장기요양보험	다-7*10.25%	10.25	%
다-10)퇴직공제부금비	나-1*2.30%	2.30	%
2.일반관리비	1의*6.00%	6.00	%
3.이 윤	(나+다+2)의*15.00%	15.00	%
4.공 사 원 가	1+2+3
5.부가가치세	4의 10.00%	10.00	%
6.공사금액

6. 건설기술자 현장 부재(이탈)에 대한 제재조치

○ 현장대리인은 원칙적으로 작업 중 반드시 현장에 상주하여야 하며, 부득이 현장을 이탈할 경우에는 공사감독자의 승인을 득하고, 업무 전반을 안전관리자에게 인수인계 후 현장 이탈과 복귀 시점을 공사감독자에게 보고하여야 한다.

○ 공사감독자는 승인기록부**에 위 보고사항에 대하여 기록하여 보관한다.

건설기술자 현장부재 승인 기록부

공사 번호	공사명	공사 기간	관련자 (직,성명)	부재 일시(기간)	부재 사유	업 무 대행자	감독자 확 인
			현장대리인
			안전관리자

○ 선로지장 우려 작업의 경우, 현장대리인 ․ 안전관리자 중 1명이라도 현장을 이탈한 경우 당일 작업을 취소

○ 미리 감독자의 승인을 받은 경우에는 반드시 감독자가 현장 입회한 상태에서 작업시행하고, 복수(보조)감독자 배치 불가

○ 안전관리자가 배치되지 않은 공사인 경우, 현장대리인이 현장을 이탈할 경우에는 당일 작업을 취소

○ 열차운행선(인접) 작업을 관제센터, 역, 감독자 등 승인없이 무단작업시 업체 제재

- 열차운행선(인접) 작업시 단독작업 금지 및 위반사항 적발시 관련자는 작업현장 출입금지 조치

- 승인없이 무단작업시 전면 작업중지 및 현장대리인 교체

- 공사감독자 승인없이 현장이탈시 과태료 부과 등 관련자 제재 조치

- 열차운행선 인접공사 안전관리계획서 작성 교육시행

7. 공사현장 안전점검시 불법하도급 여부 점검 내용

1. 현장대리인 및 안전관리자 업체 재직 내용 확인

2. 건설기술인협회 등록내용, 재직증명서 및 본인 확인

3. 급여지급내용 및 은행통장

4. 건강보험, 고용보험 등 각종 보험료 납부 증빙 서류 등 (해당 공사명으로 가입하여야 한다.)

8. 사고․장애 발생시 구상제도 시행

◦ 공사 시행 중 사고 ․ 장애 유발업체에 대하여는 열차지연료, 차량 및 시설물 피해 복구비 등

직접비에 한하여 구상 * 사고․장애 경중에 따라 업체 및 건설기술자 별도 제재

9. 안전교육 직접 시행

- 우리 공사 발주 및 외부기관에서 직접 시행하는 공사 등 모든 철도인접 공사의 현장대리인 및 안전관리자에 대하여 우리 공사에서 직접교육 시행

1. 운행선 인접공사 책임자급(책임감리원, 현장대리인, 안전관리자) 월 1회 정기 소집교육 시행, 열차감시원 배치전 4시간 이상 교육 시행

가. 공사․용역 중지 등 업체 제재사항은 “안전계약 특수조건” 사항을 포함하여 계약상대자에게 교육 시행

나. 시청각 교육자료를 활용한 교육 시행 (안전의 날 활용)

2. (작업원 교육상태 점검) 정기교육내용 작업원 숙지여부 확인 점검

가. 현장 안전점검, 감독업무 수행, 안전지도사 활동시 작업원에 대하여 전파교육 시행여부 확인 (교육일지, 서명부, 작업원 인지상태 등)

※ 참고규칙 및 지침

가. 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제206호 2017.12.28.)

나. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2018-94호 2018.12.31.)

다. 운반하역 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2015-47호 2015.09.18)

라. 굴착공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-100호 2012.09.25)

마. 콘크리트공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2015-51호, 2015.9.25)

바. 해체공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-94호 2012.09.25)

사. 추락재해방지 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-95호 2012.09.25)

아. 가설공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시 제2012-92호 2012.09.25.)

자. 지붕공사 안전보건작업 기술지침 (한국산업안전보건공단 KOSHA CODE C-59-2017 2017.10.31.)

	2020년도
	공사코드 : KR-CDD-20-041
	공사명 :	중앙선 구리역 등 17개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
				도 급 예 산 내 역 서
한국철도공사 수도권동부본부 청량리건축사업소장

	2020년도
	공사코드 : KR-CDD-20-041
	공사명 :	중앙선 구리역 등 16개역 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
				설 계 도
한국철도공사 수도권동부본부 청량리건축사업소장