승 강 기  입 찰 유 의 서

1. 건  명 :정읍시기 행복주택 전기공사 1공구 엘리베이터 제작 ․ 설치

2. 품  명 : 엘리베이터(물품번호 24101601)

3. 사업금액 및 수량내역

가. 사업금액 : 90,261,855원(부가세포함, 조달수수료 별도)

나. 수량내역

품명	규격	단위	수량	비고
승강기	15인승 8층 일반형 ,(60)/min	대	1	승강기 CCTV(200만 화소이상) 설치포함
감시반	CRT 감시반( 1대분)	식	1

4. 구매방법 : 공동계약(전기공사업 면허보완을 위한 분담이행방식의 공동계약만

허용하며, 공동수급체 대표자는 승강기 설치공사업을 소지한 업체이어야 함

5. 입찰방법 : 총액입찰(부가가치세 포함), 지역제한, 전자입찰

6. 납품장소 : 정읍시기 행복주택 전기공사 1공구 현장 내

7. 납품조건 : 현장설치도

8. 납품기간 :

-1차(승강기 완성검사 합격기준) : 2021.08.23 (아파트 건축준공일 90일전)

-2차(중앙감시반 설치 등(종합성능시험 포함)) : 2021.12.06(옥외전기공사 준공일)

9. 하자담보책임기간 및 하자보증금률

가. 하자담보책임기간 : 3년 (사용검사일로부터 3년)

나. 하자보수보증금률 : 5% (최종 계약금액의 100분의 5)

10. 입찰참가자격 : 입찰서 제출 마감일 전일 현재 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자.

- 중소기업 확인서를 소지한 업체

- 승강기 제조업

- 승강기 설치공사업

- 전기공사업 등록을 필한 자(분담이행 가능)

- 전북권 내 사업자(지역제한 입찰)

- 공동이행 여부 : 불허(전기공사업은 분담이행 허용)

자재 성능시험, 제작 및 납품 후 하자보수에 대한 신속성과 일관성을 기하기           위하여 공동도급(계약)은 허용하지 않음

11. 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 및

하도급지급수수료 등 사후정산 안내

가. 국민건강보험료 등은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제73조에         따라 사후 정산합니다.

나. 대가지급시 기획재정부 회계예규 정부 입찰ㆍ계약 집행기준 제19장(국민건강         보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등)에 정한 바에 따라 사후 정산합니다.

다. 산업안전보건관리비는 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

(고용노동부 고시)』에 따라 사용되어야 하며, 목적 외 사용 및 사용하지 않은

금액에 대해서는 반영금액 내에서 최종 정산합니다.

라. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 국민건강보험료 등은 설계가격 작성 시 계상된

아래의 금액(부가세 제외)을 조정 없이 반영하여야 합니다.

(단위 : 원)

국민건강보험료	국민연금보험료	퇴직공제부금비	노인장기요양보험료	산업안전보건관리비	환경보전비
363,877	490,989	250,950	37,297	531,021	42,963

12. 참고사항

가. 공사기간 : 계약일  ∼ 2021.12.06(변경 가능)

나. 엘리베이터 제작,설치 기준은 LH 주택건설 전문시방서, 관련법령 및 적용기준에 의함.

다. 납기일과 수량 등은 공사현장 여건에 따라 변경될 수 있으므로 계약 이후

발주처와 소요시기 및 납품일정 등에 대하여 별도 협의 하여야 함.

라. 건축공사 준공일(F) 180일 전까지 승강기 제작·설치를 위한 주요자재를 반입 및

옥탑층 골조완료에 따른 승강로 인수·인계를 건축공사 업체로부터 받아야 하며,

F-90일 전까지 승강.기 설치(완성검사 합격기준)를 완료하여야 하고,

미 준수시는 관련근거에 따라 조치.

마. 현장대리인은 공사착공 시 반드시 선임하여 상주를 하여야 하며,

품질관리 전담자 및 안전관리자를 지정하여야 합니다.

바. 중앙감시반, CCTV 및 지구 내 설치되는 타 회사 엘리베이터제품과 연동에

문제가 없도록 조치하여야 합니다.

사. 공사감독자 판단에 의하여 제작과정 중 생산과정검사를 시행할 수 있음.

아. 준공검사 및 관리소 인수인계 관련하여 입회 요구시 성실히 협조하여야 함.

자. 상기조건 및 시방서, 도면 등 관련기준 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 있음

차. 준공 시 공인기관 정밀점검 시험성적서를 제출하여 운행품질 증빙을 하여야 함.

카. 필요에 따라 승강기 안전장치로 카도어 락킹 디바이스가 설치 가능하여야 함.

13. 계약 불이행 시에는 조달청에 계약해제 또는 해지를 요청 할 예정이며, “국가를      당사자로 하는 계약에 관한 법률” 등 관계법규에 의거 부정당업자로 제재되어       관급자재 납품제한 등의 조치가 취해 질 수 있으니, 반드시 입찰 전 관련 시방서,      도서 등을 숙지하시기 바랍니다.

별첨. 부가가치세 면세적용 위한 입찰공고문 유의사항

◐ 부가가치세 사후 정산

- 본 입찰 공고 건은 국민주택 건설용역으로「조세특례제한법」에 따라 낙찰자가 다음 각호의 어느 하나에 해당할 경우 부가가치세가 면제되는 사업으로, 낙찰금액에서 설치비에 계상된 부가가치세 금액은 사후차감합니다.

1. 물품을 제조하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 해당 전문건설업을 등록하여, 자기의 사업장에서 생산한 물품을 설치를 전문적으로 수행하고 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서를 가진 다른 사업장으로 반출한 다음, 반입한 사업장의 책임 하에 자기의 사업장에서 제작한 물품을 국민주택규모 이하의 주택에 설치·시공하는 경우

2. 물품을 제조하는 사업자가 「건설산업기본법」에 따라 해당 전문건설업을 등록하여, 제조업과 건설업을 겸영하는 경우로서, 설치를 전문적으로 수행하는 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서를 두고 해당부서의 책임하에 자기의 사업장에서 제작한 물품을 국민주택규모 이하의 주택에 설치·시공하는 경우

< 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서 예시>

부서	인원(명)	업무내용
관리부	2	인사, 총무, 회계, 총괄관리
개발실	3	디자인개발 및 도면관리
시공관리부	3	영업 및 현장관리
자재부	3	자재관리, 발주 및 출고
품질관리	1	품질관리 및 실험관리
생산부	13	제품생산

※ 생산부에서 제품을 생산하고 시공관리부(또는 영업부)에서 영업 및 현장관리를 하는 경우 독립된 사업부서로 간주함

※ 근거 : 국세청 법규부가2018-719(‘18.11.29)

- 각 항에 해당하는 낙찰자는, 독립된 사업체로 분리·파악되는 별개의 사업부서 확인을 위하여, 계약체결 시 부서명, 부서인원, 업무내용이 표기된 회사조직도를 제출해야 합니다.