설 계 자	심 사 자	센 터 장	지 사 장	설계년월일	2021. 03. .
				심사년월일	2021. 03. .
2021년도 서해대교 곤돌라 보수보강공사 설 계 서 한 국 도 로 공 사 당 진 지 사

설  계  설  명  서

1. 목 적

본 [서해대교 곤돌라 보수보강공사]건은 2019년 서해대교안전센터에서 시행한 서해대교 교량점검시설 정밀안전진단(리프트, 곤돌라)결과 곤돌라에 기계장치 결함부재가 확인되어 이를 신속히 보수하여 정기점검 및 정밀점검을 원활히 수행해야 할 필요성과 이에 대한 점검결과 주탑외부 및 사장교 케이블의 결함부재 발견시 보수를 위한 기계장치로서의 기능을 수행하기 위해 신속히 보수가 필요하여 보수공사를 시행하고 이에 따른 서해대교 장대교량의 기능성과 안전성을 확보를 위해 공사를 시행함.

2. 공사개요

1) 서해대교 곤돌라 보수보강 : 3개소

3. 설계 변경 조건

1) 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의해서 설계된바, 조사 불능한 부분(위험부재 부분 등) 및 조사 이후 변동 사항이

발생 하였을 때에는 실제에 맞추어 변경할 수 있다.

2) 본 공사에 적용된 노임은 ‘2021년 상반기 노임’을 기준으로 적용하였는바, 이후 변동될 시는 관계 법규에 정하는 바에 따라  설계 변경

할 수 있다.

3) 본 공사에 관한 당사의 방침이 변경되었을 경우에는 당사의 방침에 따라 변경 시공하고, 실제에 맞추어 설계 변경     한다.

4) 설계 수량은 현장 여건에 따라 실제대로 정산할 수 있다.

5. 공사기간

본 공사기간은 착공일로부터 150일간으로 하며, 공사추진은 합리적인 공정 계획에 의하여 공사 감독원의 지시에 따라

시행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 당사의 승인을 얻어 공사 기간을 변경할 수 있다.

1) 당사 방침 변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때.

2) 계약이후 당초 공사 수량이 현저하게 증감되었을 때.

3) 기상 불량(강우 ,강설, 기온저하) 일수가 10개년 평균일수보다 많을 때.

4) 천재지변 및 내우외환으로 작업이 불가능할 때.

5) 인허가 등으로 인한 착공지연 등.

특  별  시  방  서

( 공 통 사 항 )

1. 본 공사는 본 특별시방서, 한국도로공사 및 국토교통부 제정 표준시방서(기계설비) 및 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

2. 현장대리인은 착공과 동시에 원활한 시공을 위한 공법 및 세부작업 계획서에 예비공정표를 포함한 시공계획서를 제출하고 감독원의 승인을 득한 후 시공에 임하여야 한다.

3. 도급자는 본 공사로 인하여 공사장 어느 부분에도 손상을 입혀서는 안되며, 공사수행상 부득이 손상을 입혔을

때에는 감독원의 승인을 얻은 후 시공하고 손상부분은 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

4. 교통통제는 실 통제 일수에 따라 정산한다.

5. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 K.S 품 또는 동등 이상의 자재를 사용하여야 하며, 부득이한 경우 감독원의

사전 승인을 얻어 시공하여야 한다.

6. 도급자는 본 공사에 소용되는 주요 자재를 감독원의 사무실에 2가지 이상 견본을 반입 전에 비치하고 감독원의

사전 승인을 얻어 시공하여야 한다.

7. 본 공사 시공 중 안전관리는 도공기준에 맞게 철저히 하여야 하며, 모든 사고에 대한 책임은 도급자 책임으로 한다.

8. 도급자는 본 공사 시행 중 설계도서 및 시방서의 규정에 적합한 시공을 위하여 시험대장을 비치하고 공사에

필요한 시공관리 시험을 실시하여야 한다.

9. 현장대리인은 현장에 상주하여야 하고, 부득이 현장을 이탈할 경우에는 공사감독의 사전승인을 받아야 한다.

10. 도급자는 착공과 동시에 다음 사항의 중요 도서를 제출하여야 한다.

11. 공사 준공과 동시에 다음 사항의 중요 도서를 제출하여야 한다.

가. 최종 준공도면 3부.

나. 본 공사를 위한 대 관청 제출도서, 허가서, 사용검사필증

다. 보존을 요하는 도서 및 기록서

라. 각종 열쇠 (개소당 2조)

12. 본 공사에 소요되는 차량의 고속도로 무료 통행증은 계약자의 신청에 의거 우리공사에서 발급한다.

13. 본 공사에서 친환경상품이란 「친환경상품구매촉진에관한법률」제2조의 정의에 의한 친환경상품을 의미하며,

설계도서에 친환경상품으로 명시된 품명은 이를 적용하여야 한다.

14. 안전관리비, 건강보혐료, 환경보전비, 연금보험료등은 실제 사용액 증빙 서류에 의해서 정산처리 한다.

15. 폐기물 발생에 따른 처리비는 실비정산을 원칙으로 하며, 정산 시 처리완료에 관련된 증빙서류를 제출하여야 한다.

16. 도급자는 계약 후 제작품의 경우 본 시방서에 의거하여 승인도면를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 제작, 설치하여야    한다.

17. 도급자는 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 공사추진 상 필요하다고 인정될 때에는 경미한 사항이라도

감독원의 지시에 따라야 한다.

18. 공사장 관리

공사장 관리는 감독원과 협의하여 이행하여야 하고 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 근로자 및 기타 출입자의 감시 및 풍기, 위생 감독

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시

3) 자재 및 장비관리, 정돈

4) 현장 내.외 청결유지

5) 차량의 왕래가 빈번한 곳의 교통정리 및 안전관리 철저

6) 공사장 주변의 일반 대중과 이용차량의 안전과 편의도모 전항에 대한 사고가 발생되었을 때에는 일체 도급자가

책임을 진다.

19. 운영 및 보수관계

인수인계시까지 시설물을 보호하고 모든기기에 대한 운영 및 보수에 대한 교육을 시킬 책임을 도급자가 지며, 필요시

일정기간에 걸쳐 시행한다.

20. 현장대리인

1) 현장대리인은 법령에 의한 해당 면허소지자로써 우리공사 업무규정에 의거 공정계획서(예정공정표)를 감독원에게

제출하여야 하며, 현장에 상주 근무하여야 한다.

2) 현장대리인은 각종업무와 보안책임을 지고 감독원의 승인없이 현장을 이탈하여서는 안된다. 다만, 부득이 현장을 이탈시는 감독원의 사전승인을 득하여야 한다.

( 특 별 사 항 )

1. 성능의 검증

산업안전보건법 제83조(안전인정기준)에 의거 위험기계․기구 안전인증 고시(고용노동부고시 제2020-41호) 제19조(제작 및 안전기준) [별표8:곤돌라 제작 및 안전기준]조건에 부합하게 기계‧기구를 보수하고 각 세부 부재별 제작 및 안전기준에 맞게 조치 후 준공 처리 하여야 한다.

2. 이  의

공사 시방서와 설계도가 상이한 경우, 또는 명기가 누락된 경우와 이의가 있는 경우에는 반드시 감독원과 협의 후

그 의견에 따라야 한다.

3. 공사의 부실

공사의 어떤 부분의 시공이 부실하다고 인정되거나, 부실을 초래할 염려가 있다고 판단될 경우에는 보완 교체 시정

할 때까지 기성금의 지불을 유보 또는 금지할 수 있다. 또한 충분한 품질보증이 되지못할 사항이 사후에 발견될 때

에는 전에 이루어진 승인 사항을 유보 또는 취소할 수 있으며 시공자 부담으로 완전한 품질이 되게 해야 한다.