과 업 지 시 서

한국생산기술연구원 화물용 승강기

철거 및 교체 공사

2021.  04.

□ 사업명

○ 한국생산기술연구원 화물용 승강기 철거 및 교체 공사

□ 목 적

○ 2021년도 한국생산기술연구원 노후승강기 철거 및 교체공사를 수행함에 있어 최적의 업체선정과 적절한 예산으로 승강기 이용시 보다나은 안전을 위함.

□ 개 요

○ 위  치 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 양대기로길 89 한국생산기술연구원

○ 공사호기 : 1대

1. 연구동 화물용 [고유번호5009-984]

□ 범 위

○ 승강기 안전관리법 시행규칙 제1장 총칙 제3조(승강기 교체의 범위)에 따라 승강기 부품을 모두 교체한다.

1. 균형추(均衡鎚)

2. 기계대(機械臺)

3. 주행안내 레일

4. 주행안내 레일의 부분품

5. 출입문의 문틀

□ 과업의 세부내용

1. 국토교통부고시 제2018 - 614호 제26조(참가자격제한)에 해당되지 않는 업체

2. 국가종합전자조달시스템 조달청 등록업체

3. 2018년 3월 28일 공표된 개정법적용 인증 수행가능 업체

4. 건설산업기본법 에 의한 승강기설치공사업을 등록한 업체

5. 승강기제조업 등록 업체

6. 승강기 직접생산확인증명등록(직접생산설비보유) 업체

7. 승강기 납품 후, 직영 A/S로 3년간 하자보수의무가능 및 유지보수 수행가능업체

8. 승강기 납품시 현행 건설산업기본법에 의거 전문건설업의 재하도급을 금지함에 따라 직영설치 투입이 가능해야 하며, 하도급 적발시 계약파기 및 부정당경쟁업체로 지정 통보 예정

9. 장애물없는 생활환경(Barrier Free)인증 승강기부문에서 결격사유가 없어야한다.

- 승강기 이용시 시각 및 청각장애인을 위한 승강장 도착알림용 점멸등, 음향안내

- 승강기 이용시 시각 및 청각장애인을 위한 승강기 내부 운행상황표시, 도착층 음성안내

10. 승강기 고장시 엘리베이터 기계실, 엘리베이터 내부, 승강장에서 원인파악분석 및 고장처리를 할수 있도록 시공가능한 업체

12. 승강기 설치 완료 후 6개월은 무상 보수하며, 하자보증기간은 3년으로 한다.

12. 공사 자재 운반 및 공사에 발생하는 폐기물 반출, 청소를 수행하며 민원이 발생하지 않도록 하여야 하며 공사 중 발생하는 폐기물은 관련법령에 따라 공사 업체에서 부담하여 처리하여야 한다.

13. 승강기 설치 도면은 설치 완료 후 발주처에 제출 한다.

14. 승강기 설치 이전에 공정 회의는 3회 이상 실시 한다.

15. 승강기 설계 및 도면 승인은 발주처에 승인 후 승강기 제작 및 설치한다.

16. 설치 협의 및 공정회의에서 협의 된 내용은 변경되지 않으며, 공사 일정,추가 공사비용은 지급하지 않는다. 단, 부득이하게 공사 변경에 대하여는 발주처와 사전 협의하여야 되며 발생하는 비용은 시공 업체에서 부담한다.

16. 현재 설치 운영 중인 승강기 제원에 준하여 설치 공사를 실시 한다.

□ 승강기 제원

	연구동	비고
승강기고유번호	5009-984
종류 및 형식	화물용/로프식 VVVF
운행 층수	B1-5(6)
적재하중	2500㎏
최대인원	0승
정격속도	0.75m/s
현수로프(직경)	14mm
현수로프(가닥)	6가닥
조속기 안전로프	8mm
분개폐 방식	SO
카 치수(폭)	2000mm
카치수(안길이)	2250mm
가이드레일(카축)	24K(T)
가이드레일(균형추측)	18K(T)

□ 승강기 설치 공사 일정

공정	일정표(단위:일)
	1~7	7~14	14~30	30~50	50~60	60~90	90~100
계약	●
현장 답사 및 설치 협의		●
공정 회의			●
설계 및 도면 승인				●
제작					●
철거 및 설치 공사						●
시험 운행 및 준공							●
운행 개시							●

□ 결과물 제출

1. 결과물 파일 및 출력물 형태로 제출

- 세부 수행계획서 (1종, 계약일로부터 1주일 이내)

- 최종 결과보고서 (1종, 계약종료일 이내)

2. 본 과업의 최종성과가 그 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이 발견된 경우에는 과업완료의 전‧후를 막론하고 발주기관의 지시에 따라 지체없이 과업수행자의 비용부담으로 보완조치 완료해야 함

- 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발행한 경우에 대하여 무상

서비스를 실시(보증기간 : 3년)

□ 검사 및 검수

1. 과업수행자는 용역의 최종 검사 요청 시 최종 성과물과 함께 과업 진행과정 및 결과내용을 수록한 결과보고서 및 정산보고서(지출증빙자료 포함)를 제출하여야 함

2. 제출하는 최종결과물에 검사·검수를 실시하여 검사내용에 대해 한국생산기술연구원의 시정요구가 있을 경우 과업수행자는 성실히 이행하여야 함

□ 해지 조건

1. 한국생산기술연구원은 용역 수행 중 특별한 사유 없이 다음사항이 발생할 경우 계약위반 행위로 간주, 계약 해지 등 법적 조치를 할 수 있음

- 한국생산기술연구원의 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 아니한 때

- 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없거나 현저하게 계획공정이 미달될 때

- 부품설치 및 교체공사 진행시 현행 건설산업기본법에 의거 전문건설업의 재하도급을 금지함에 따라 직영설치 투입이 가능해야 하며, 하도급 적발시 계약파기 및 부정당경쟁업체로 지정 통보 예정

- 승강기(기존) 제원과 조건에 부합 할 경우