목     차

1. 설계설명서

2. 일반시방서

3. 특기시방서

4. 설계예산서

1. 설 계 설 명 서

2. 일 반 시 방 서

3. 특 기 시 방 서

1. 설계 설명서

1. 공 사 명 : 남포지하도상가 에스컬레이터 스텝체인 교체 공사

2. 위    치 : 부산광역시 중구 구덕로 지하44(남포지하도상가 6번, 7번 출입구)

3. 목    적 : 에스컬레이터 스텝체인의 마모, 변형(늘어남)으로 인해 이상 소음발생 및 발판 처짐 등

안전사고 우려가 높아 스텝체인을 교체하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

4. 입찰자격 : 건설산업기본법령에 따른 전문건설업 중『승강기설치공사업』을 등록한  업체이고, 주된

영업소가 입찰 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약일) 까지 부산광역시에 소재한 업체

5. 대상 및 내역(스텝체인 145Unit 교체)

대 상	교체수량	규 격 및 사 양	비 고
남포에스컬레이터 6번 출입구(상행)	71 Unit	○체 인: 1200형(지지봉, 롤러 포함) Step Chain Assy 101UNIT, 설치업체 : 현대엘리베이터	재사용 30 Unit
남포에스컬레이터 7번 출입구(상행)	74 Unit	○체 인: 1200형(지지봉, 롤러 포함) Step Chain Assy 98UNIT, 설치업체 : 현대엘리베이터	재사용 24 Unit

6. 작업내용

- 안전솔 철거 및 재설치

- 스텝 철거 및 재설치

- 스텝체인 철거 및 설치(재사용 54Unit)

- 트러스 및 주행로 정비(청소)

- 시운전

7. 설치기간 : 착공일로부터 25일

8. 공사예정 공정표

일 정 공 종	20일	4일	1일	비 고
현장조사 및 자재준비
스텝체인교체
시 운 전

9. 하자보증기간 : 준공 후 3년

3. 일반시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 ｢남포지하도상가 에스컬레이터 스텝체인 교체공사｣에 대하여 적용한다.

나. 본 공사는 승강기 안전 관리법, 기계설비 및 전기관련법규, 교통약자의 이동편의 증진법 또는 산업안전보건법, 소방법 등의 법령을 준수하여야 한다.

다. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 공사계약 일반조건 및 공사계약 특수조건 등 계약조건에 따른다.

2. 용어의 정의

가. 발주처

발주처라 함은 해당공사의 시행주체인 부산시설공단을 말하며, 시공자에 대한 계약당사자로서 “발주자” 라고도 한다.

나. 수급인

수급인이라 함은 발주자로부터 공사를 도급받아 공사를 시행하는 계약대상자이며 “수급자” 또는 “계약자” 라고도 한다.

다. 감독원(이하 “감독원”이라 함)

감독원이라 함은 부산시설공단 이사장이 임명한 공사 감독원을 말한다.

3. 시공 계획

가. 계약자는 계약 체결 후 아래 내용을 포함한 착공계를 제출하여 승인을 받은 후 공사하며, 공사기한 내에 완료할 수 있도록 계약이행에 만전을 기하여야 한다.

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 예정 공정표

4) 계약금액에 따른 산출내역서

5) 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙 서류를 제출하여야 한다.

다. 계약자는 시공 전 현장 및 타 공정과 협의하여 시공 전 공사계획서를 상세하게 작성하고 감독원의 승인 후 시공하여야 한다.

4. 건설기술자(현장 대리인)

가. 계약자의 건설기술자(현장대리인)는 건설산업 기본법령에 따른 기술자 배치 기준에 적합한 자를 선임하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 건설기술자는 공사와 관련하여 현장 및 안전관리 등 업무(관계 서류의 작성, 시공, 각종 검사의 입회 및 시운전 등)에 대한 책임을 져야 한다.

다. 건설기술자는 공사 중 현장을 떠나지 말아야 하며, 부득이한 경우 감독원과 사전 협의를 하여야 한다.

라. 본 공사 건설기술자를 교체할 경우 교체 내용을 서면으로 제출하여야 한다.

마. 건설기술자의 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정 시는 발주처의 교체 요구에 응하여야 한다.

5. 현장조사

계약자는 계약 후 현장을 사전에 답사하여 스텝체인 규격 및 치수를 확인하고, 정확한 설치가 될 수 있도록

하며, 당초와 변경이 있을 때는 감독원에게 보고 후 설계제작에 반영하여야 한다.

6. 단 위

길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 미터법(M.K.S)으로 표시함을 원칙으로 하되 불가피한 경우 발주처와 협의

조정 할 수 있다

7. 계약자의 의무

가. 본 시방에 의거 공급될 자재는 KS표시 품 또는 이와 동등 이상의 신품으로 제작 설치되어야 하고 안전성과 정밀성이 확보되어야 한다.

- 스텝체인은 KS B 6853에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

- 스텝체인 Ass’y는 국내산을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 소요되는 자재는 승강기 안전관리법에서 정하는 부품안전인증을 받은 제품 또는 그에 준하는 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

다. 본 건에 대한 재질의 변경은 설치 품과 동등이상의 재질(인장시험등의 관련증빙자료 제출)로서 감독원의 승인을 득한 후 변경 할 수 있다.

라. 계약자는 계약체결 후 반드시 현장을 확인 점검하고 감독원이 지정한 기일 내에 관련도면 및 예정공정표를 공사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 계약자는 감독원의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고 하여야 한다.

바. 계약자는 승강기검사기준을 준수하여야 한다.

8. 도면승인

계약자는 착공일로부터 10일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여 제시를 하여야 하며 승인도면(공인기관 시험성적서 및 안전확인 신고서 포함)은 공단의 승인을 받아 제작에 임하여야 한다.

9. 안전 관리

가. 계약자는 노동법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수한다.

1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

4) 교체공사 작업장 근처 안전휀스 설치 및 안내문구 부착 철저

5) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책마련

6) 계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

7) 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료 시설을 준비하여야 한다.

나. 계약자는 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 하며, 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 계약자는 공사도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지하기 위하여 철저한 보안 대책을 수립하여야 한다.

라. 작업 종료 후 현장정리를 철저히 하여 지하도상가 영업에 지장이 없도록 하며, 이를 준수하지 못해 발생하는 모든 안전사고 및 민원관계에 대해서는 계약자가 일체의 책임을 진다.

마. 작업상 화기(용접 등) 등을 취급할 경우에는 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 한다. 특히 작업 중 또는 작업 후 화재 등의 안전관리에 각별히 유의하여야 한다.

10. 사고 및 재해 방지 대책

가. 계약자는 안전 수칙을 준수하고 재해사고 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 계약자는 시공도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전 관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원, 현장대리인 등과 충분히 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업하여야 한다.

다. 계약자는 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행하도록 하여야 한다.

라. 계약자는 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(공단, 병원, 경찰서, 소방서 등)에의 연락 방법 등을 종사원에게 주지시켜야 한다.

11. 공사의 시행

가. 계약자는 본 공사와 관련하여 상호간에 긴밀한 연락과 협의로 공사 시행에 만전을 기하여야 하며, 계약자는 공사가 지연된다고 판단될 때에는 상세한 사유를 감독원에 보고하고 공정만회에 최선을 다하여야 한다.

나. 공사 진행 중 발생되는 민원에 대하여는 계약자의 책임 하에 공정 계획에 차질이 없도록 조속히 수습, 해결  하여야 한다.

다. 계약자가 불완전한 시공을 하거나 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 또한 감독원의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법을 변경 할 수 있다.

라. 본 공사와 관련하여 각종법령 및 규정에서 정하는 수속은 계약자 책임 하에 수행하여야 하며, 허가수속이 완료된 후에는 관공서에서 발행된 인ㆍ허가 관련 서류 일체를 지체 없이 스크랩하여 감독원에게 제출하여야 한다.

마. “라”항과 관련되는 수속절차는 해당 공정 전에 완료하여 준공에 지장이 없어야 하며 수속지연 등으로 인한 공사 시행의 차질 발생에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

바. 계약자는 공사 시행 전에 공종별 주요 사항에 대하여 감독원과 충분히 협의 후 시행하여야 하며 임의 시공에 따른 하자와 시설물에 대한 손상은 계약자 부담으로 지체 없이 시정하여야 한다.

사. 공사에 필요한 조사 측량은 계약자 부담으로 행하여야 하며 그 결과를 감독원에게 보고 하여야 한다.

아. 계약자는 스텝체인 교체공사 전 운영 중인 에스컬레이터 이상유무를 반드시 확인하여야 하며, 교체 후 장애발생시 계약자 책임으로 보수하여야 한다.

자. 계약자는 준공검사 전 에스컬레이터 유지관리 용역업체와 합동점검 후 이상 없음을 확인할 수 있는 점검표 및 인수인계서를 제출하여야 한다.

차. 계약자는 공사의 진행사항, 자재 사용내역을 감독원의 요청 시 기록하여 서면으로 제출하여야 한다.

카. 계약자는 착공부터 준공까지 공사와 관련되는 모든 사항에 대하여 계약자 책임 하에 빠짐없이 기록하고 사진 촬영하여 감독원에게 제출하여야 한다.

타. 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가 시설물을 설치할 경우 설치 장소, 방법 등 제반사항은 감독원과 협의하여 시행하며 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료 저장소 등은 불연재를 사용하고 화재 예방을 위하여 소화기를 비치하여야 한다.

파. 공사 완료 후 작업구간에 대한 정리, 청소를 깨끗이 하여야 한다.

하. 공사 중 발생하는 폐기물(석면은 별도의 관련법에 의거 처리) 처리는 관련법에 의거하여 조치하며, 필요시 공사에서 요구하는 서류를 제출하여야 한다.

12. 시공의 확인 및 입회 검사

계약자는 다음 사항에 대하여는 감독원의 확인 및 입회 검사를 받은 후 다음 공정을 시행하여야 한다.

가. 준공완료 후 외부에서 점검이 곤란한 작업.

나. 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항.

13. 사용 자재 및 검사

가. 본 공사에 소요되는 자재는 KS 표시품 또는 KC 인증품 사용을 원칙으로 한다.

나. 본 공사에 소요되는 자재는 승강기 안전관리법에서 정하는 부품안전인증을

받은 제품 또는 그에 준하는 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

다. 필요시 감독원은 계약자가 반입한 재료에 대하여 이상이 있다고 판단될 경우 공인기관에 검사 및 시험을 의뢰 할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

라. 계약자가 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 기계 및 재료는 사용 전에 감독원의 검사를 득한 후 사용하여야 한다.

마. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독원의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독원의 지시에 따라 철거, 재시공하여야 한다.

14. 자재 운반 처리

가. 철재류 등은 지상으로 끌거나 던지는 사례가 없도록 하고 훅크 및 기타 운반 기구에 의한 손상이 발생하지 않도록 운반하여야 한다.

나. 기타 자재는 감독원의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장하여 운반하여야 한다.

다. 중량물 운반시에는 특히 안전에 주의하여야 하며 타 시설물에 파손이 없도록 하고 타 시설물 손괴 시 이에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

15. 공사 기간의 연기 및 중지

공사 시행중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 공사를 중지 또는 연기할 수 있다.

가. 관급자재의 공급 지연으로 인하여 공사가 지연될 경우

나. 설계 변경으로 인하여 공사 기간이 연장을 요할 경우

다. 관련 공정의 공사 지연으로 시공이 불가할 경우

라. 기타 공사 사정으로 공사가 지연될 경우

※ 계약자의 귀책사유로 발생한 공사지연의 경우「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조(지연배상금)」,「계약사무 처리내규」에 따라 지연배상금이 적용되며 이에 따른 공사기간 연기원을 접수하여야 한다.

16. 설계변경 및 정산

본 공사 시행중 다음과 같은 사항이 발생되는 경우에는 설계 변경할 수 있다.

가. 주요 구조물의 변경 및 현장의 조건 변경

나. 주요 공법의 변경

다. 공사의 사정에 의해 설계 변경이 불가피한 경우(물량 조정 포함)

라. 기타 계약서에 명기된 설계 변경요건인 경우

17. 하자기간

가. 본 시방서에 의하여 에스컬레이터 스텝체인 교체의 보증기간은 공사완료일 기준으로 하며, 하자담보책임기간은 3년간(2%)으로 한다.

나. 스텝체인 교체와 관련한 모든 장애에 대하여는 계약자의 책임으로 전량 무상 수리ㆍ교체하여야 한다.

다. 하자담보책임기간 내 발생한 설계ㆍ재료 및 제작 불량 등 계약자의 귀책사유로 발생한 고장에 대하여는 계약자가 모든 책임을 지며, 무상으로 수리ㆍ개조 또는 교체하여야 한다.

18. 준공 시 제출서류

가. 공사 준공은 본 설계도서 및 시방서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료되었다고 감독원이 인정하였을 때 준공된 것으로 본다.

나. 본 건이 완성되었을 때 계약자는 발주자에게 아래 서류를 제출하여야 한다.

1) 도면 : 2부

2) 제작 및 설치공정 사진대장 : 2부

3) 공인기관 시험성적서(안전확인 신고서 포함) : 2부

※ 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제15조(안전확인대상품목)

4. 특기시방서

1. 적 용

본 시방서는 ｢남포지하도상가 에스컬레이터 스텝체인 교체 공사｣에 대한 특기사항에 적용한다.

2. 기존 제작사양

대 상	제작사	수량	형식	전 원	동 력	스텝수	경사각도	설치높이
남포에스컬레이터 6번계단(상행)	현대	1대	1200형 (UP)	3상380V60HZ	11KW	101개	30°	8m
남포에스컬레이터 7번계단(상행)	현대	1대	1200형 (UP)	3상380V60HZ	11KW	98개	30°	7.7m

3. 작업준비

가. 작업구간 내에는 관계자 외에 출입을 제한하는 차단봉 등을 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 작업 안내문은 공사명, 주요내용, 공사기간, 시행처, 계약자(건설기술자)비상연락처 등의 내용이 포함되어야 한다.

다. 작업안내문은 상, 하부 벽면에 최소한 2매 이상 부착 또는 배치하여야 한다.

라. 작업에 필요한 공구류 및 자재는 사전에 빠짐없이 준비하여 작업 지연으로 인한 불편이 가중되지 않도록 원활하게 진행하여야 한다.

4. 주요부품 운반

가. 스텝체인은 중량물을 다량으로 운반하는 과정으로 지하상가 특성상 계단을 이용 운반(외부↔지하상가)해야 함으로 운반자 및 지하상가 이용객의 안전사고에 유의하여 운반하여야 한다.

나. 철거품 운반 시는 주요부품에 기름이 묻은 상태로 기름덩어리가 운반 중 바닥에 떨어지지 않도록 하며, 떨어진 경우 깨끗이 닦아야 한다.

5. 안전솔 철거 및 설치

가. 안전솔의 모(毛)를 철거한 후 홀더를 철거하며, 홀더에 개별 위치표시를 하고 모(毛)가 손상(뽑히지)되지 않도록 철거, 또한 보관 시에도 수평으로 적재하여 모(毛)의 짓눌림이나 손상이 없도록 하여야 한다.

나. 안전솔 설치는 홀더를 제 위치에 먼저 고정한(불량 시 고정 볼트 홀 재시공)  다음 모(毛)를 설치하여야 하며, 설치 후 고정 볼트가 외부로 돌출 또는 탈락되지 않도록 견고히 하여야 한다.

6. 스텝(Step) 분해 철거 및 설치

스텝(Step)의 분해 철거나 설치 시 트레드 및 라이저부에 찍힘이 없도록 주의하고, 보관 시 수평·수직     적재를 견고히 하여 무너지거나 파손되지 않도록 하여야 한다.

7. 스텝체인(Step Chain) Assy 철거 및 설치

가. 체인의 철거 및 설치시는 하중(자중)이 걸려 있는지 여부와 기타 안전 상태를 확인한 후 시행하여야 한다.

나. 스텝체인 철거 후 스텝체인에 관련된 장치에 대하여 청소 및 부분정비를 하여야 한다.

다. Unit별 스텝체인을 Assy 조립 시 체인이 손상되지 않도록 운반 조립·설치하여야 한다.

라. 2019년, 2020년 부분 교체된(6번 상행 30Unit, 7번 상행 24Unit) 스텝체인은 재사용해야하며 재사용 시 유지관리업체와 협의하여 교체한다.

마. Assy의 스텝체인을 설치할 경우 기존 설치된 것과 동일한 제품의 것으로 교체 설치하여야 하며, 스텝이 상ㆍ하부 진입 시 플랫폼과 간섭이 없어야 한다.

바. 스텝체인 교체 시 타기기에 영향을 미쳐서는 안 되며, 교체완료 후 시운전 시 기계적 마찰음이 없어야 한다.

사. 스텝체인 연결 시 하부 기계실이나 주행로 내부에서 작업을 하지 않아야 한다.

아. 스텝체인 설치 후 구동 스프라켓 치형은 스텝체인 링크플레이트 사이에 중앙에 위치해야 한다.

자. 스텝체인은 각 스텝을 연결하여 구동하는 특수체인으로 충분한 강도를 지녀야 한다.

8. 주행로 및 트러스 청소

가. 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이 없도록 해야 한다.

나. 이물질 제거 후 트러스 및 주행로의 이음·표면 상태를 확인하여야 하며, 보완 필요시 조치하여야 한다. 조치에 따른 경비는 본 설계서에 포함된 것으로 한다.

다. 하부 턴라운드(원형레일)는 에스컬레이터 신설시 설치 위치에 재 고정하여 향후 유지관리시 체인장력 조정에 충분한 여유분을 둔다.

9. 스프라켓 위치조정

하부 턴라운드(스프라켓)는 에스컬레이터 신설시 설치 위치에 재 고정하여 향후 유지관리시 체인장력 조정에 충분한 여유분을 둔다.

10. 시운전(안전스위치 조정)

가. 스텝체인을 시운전하면서 스텝체인 링크플레이트판 연결부위에 체인오일을 주입하여 한다.

나. 계약자는 설치 완료 후 감독원 입회하에 2시간 이상의 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 중 미비 사항은 계약자 책임 하에 즉시 보완하여 감독원의 확인을 받아야 한다.