금곡동 동원역 앞 육교승강기 교체공사

설  계  서

2021 . 5

부산광역시 북구

설   계   설   명   서

1. 공  사  명 : 금곡동 동원역 앞 육교승강기 교체공사

2. 위      치 : 부산광역시 북구 금곡동 금곡대로 575 동원역 앞 육교승강기

3. 목      적 : 본 공사는 금곡동 도시철도 2호선 동원역 앞 육교승강기가 노후하여 고장 및 갇힘 사고 우려가 높아 승강기 및 승강장 구조물을 교체하여 장애인, 노약자 등 거동 불편 주민들이 육교승강기 이용 시 신뢰도를 고취하고 안전사고를 예방하는데 그 목적이 있음.

4. 공 사 개 요 :

- 승강기PIT기초확장(0.25x1.99xH1.23) : N=1개소	- 승강기PIT기초확장(0.25x1.99xH1.30) : N=1개소
- 화강판석포장(T=20cm) : A=26㎡	- 화강판석포장(T=3cm) : A=19㎡
- E/V 철거 : 2개소	- E/V 설치 : 2개소

5. 공 사 기 간

본 공사의 공사기간은 착공일로부터 180일로 한다.

단, 다음과 같은 사유가 발생하였을 경우 시행청의 승인을 득하여 공사기간을 연기할 수 있다.

1) 관계기관의 협의 또는 검토가 관계기관의 귀책사유로 지연되었을 때

2) 과업의 면적, 물량, 위치 등 과업내용에 현저한 변동이 있을 때

3) 천재지변 등 불가항력적 사유로 과업수행 불가일수가 지속될 경우

4) 발주청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

5) 기타 계약자의 책임에 속하지 않은 이유로 인하여 과업이 지체된 경우

6. 주 요 자 재

본 공사에 사용되는 주요자재는 다음과 같다.

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
레미콘	25-24-12	㎥	6
이형철근	HD13~HD16	TON	0.629
엘리베이터	13인승	대	2

7. 설 계 변 경

본 공사를 시행중 다음 각호의 사유가 발생되어 그 사유가 인정될 경우에는 시행청의 직권 또는 도급자의 요청에 의하여 설계변경     할 수 있다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3) 새로운 기술․  공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축등의 효과가 현저할 경우

4) 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우등

8. 예 정 공 정 표

공 종	보할 (%)	공 사 기 간												비 고
		30일		60일		90일		120일		150일		180일
토공사	10	2		2		2		2		1		1
구조물공사	20			5		5		5		5
승강기설치공사	40			10		10		10		10
포장공사	20			5		5		5		5
부대공사	10	2		2		2		2		1		1
단위공정율(%)		4		24		24		24		22		2
누계공정율(%)	100	4		28		52		76		98		100

설계년

월  일

2021년  5월

설계자

심사자

담  당

과  장

2021년

금곡동 동원역 앞 육교승강기 교체공사

- 승강기PIT기초확장(0.25x1.99xH1.23) : N=1개소	- 승강기PIT기초확장(0.25x1.99xH1.30) : N=1개소
- 화강판석포장(T=20cm) : A=26㎡	- 화강판석포장(T=3cm) : A=19㎡
- E/V 철거 : 2개소	- E/V 설치 : 2개소

총 공 사 비 :	일금 사억일천육백구만원정	(￦416,090,000)
- 도 급 액 :	일금 삼억구십육만원정	(￦300,960,000)
- 관 급 액 :	일금 일억일천오백일십삼만원정	(￦115,130,000)