납품 및 설치 개요서 [에스컬레이터]

1. 건    명 : 부산명지 문화복합시설 지급자재(에스컬레이터) 제작 및 설치

2. 품    명 : 에스컬레이터 [물품번호 : 24101626]

3. 세부품명 : 에스컬레이터 [세부품명번호 : 2410162601]

4. 설계금액 :  ￦ 161,596,412원 (부가세 포함)

5. 규격 및 수량 : 에스컬레이터 2대, 옥내형 1000mm, 층고6.0m, 30°, 3STEP

(별첨 내역서 참조, 시방서에 따른 부속품 설치 포함)

6. 납품기한 : 2024. 06. 03

(납기일 및 수량, 납품방법은 현장여건에 따라 변경될 수 있음)

7. 납품장소

- 부산명지 문화복합시설 건립공사 현장 내

- 연락처 : 051-460-5441 (LH)

8. 인도방법 : 납품장소 설치도 (시운전, 하자보수 포함)

9. 하자담보책임기간 : 건립공사 준공일의 다음날부터 3년(건설산업기본법 시행령 별표4에 의함)

10. 하자보수보증금율 : 5% (국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제72조)

11. 공동도급 : 허용(전기공사업 면허보완을 위한 분담이행방식만 허용)

단, 공동도급의 경우 승강기설치공사업 등록업체를 공동수급체 대표로 함

12. 입찰참가자격

입찰서 제출 마감일 전일 현재 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자

1) 「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률」제9조의 규정에 의한 직접생산확인증명서(세부품명:에스컬레이터)를 소지한 자(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효 기간 내에 있어야 함)

2) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제8조에 의한 중소기업자로서 ‘중.소기업.소상공인 및 장애인기업확인요령’에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 업체 또는 같은 법률 제33조에 의한 간주 중소기업자

3) 「승강기시설안전관리법」제5조에 의한 승강기 제조업(업종코드: 6845)

을 등록한 자

4) 「건설산업기본법」제9조에 의한 승강기설치공사업(업종코드: 0028)을

등록한 자

5) 「전기공사업법」제4조에 의한 전기공사업(업종코드: 0037)을 등록한 자

13. 입찰자 유의사항(정산성 경비 관련)

1. 계약업체는 착수서류 제출 시 원가계산서 및 비목별 단가가 명기된 세부내역서를 제출하여야 합니다.

* 원가계산서에는 제조․납품과 설치비용을 분리하여 작성하여야 하며, 반영된 산업안전보건관리비 및 보험료 등이 계상되어야 합니다.

2. 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 산출내역서 상 산업안전보건관리비, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 건설근로자 퇴직공제부금비, 환경보전비를 「산업안전보건법」「고용보험법」, 「국민건강보험법」, 「국민연금법」, 「노인장기요양보험법」, 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」, 「건설산업기본법」, 「건설기술 진흥법」에 의거 계상하여야 합니다.

3. 산업안전보건관리비, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 환경보전비 사후정산

1) 산업안전관리비, 국민건강보험료 등은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제73조, 계약예규「정부입찰․계약 집행기준」제16장 등에 정한 바에 따라 사후정산 하여야 합니다.

2) 입찰참가자가 입찰금액 산정시 산업안전관리비, 국민건강보험료 등은 설계가격 작성시 아래의 계상된 금액을 조정 없이 반영하여야 합니다.

(반영금액 미만 시 입찰내역(도급내역) 검토 시 반영금액으로 조정)

구분	산업안전 보건관리비	국민건강 보험료	국민연금 보험료	퇴직공제 부금	노인장기 요양 보험료	환경보전비
에스컬레이터	647,668	619,196	786,003	401,735	79,319	56,990
합 계	647,668	619,196	786,003	401,735	79,319	56,990

3) 준공대가의 지급 시 산업안전관리비, 건설근로자 퇴직공제부금비 및 보험료 등 납부여부를 최종 확인하며, 반영금액 범위 내에서 최종 정산합니다.

4. 산업안전보건관리비는 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)』에 따라 사용되어야 하며, 목적외 사용 및 사용하지 않은 금액에 대해서는 반영금액 내에서 최종 정산합니다.

14. 대금지불 조건 : LH 공사용 직접구매자재 업무처리 지침에 의거 시행

- 1차 : 1차 검수 완료시(에스컬레이터 완성검사 완료후) 85% 대금지급

- 2차 : 2차 검수 완료시(중앙감시반 설치 및 종합성능시험 완료후) 15%

대금지급

15. 품질조건 : 우리공사 도면 및 시방서에 의거 제작 및 납품

16. 납품(설치)조건

가. 입찰자는 입찰전 관련 시방서, 도면, 입찰 및 계약이행에 필요한 일체의 사항(공기업․준정부기관 계약사무규칙 및 회계예규 등) 및 제반 현장여건 등을 충분히 확인 후 입찰에 응해야 하며, 그에 대한 책임은 입찰자에게 있음.

나. 제작도서 검토 및 LH승인 후 확정하여 최종 제작하여야 함.

다. LH 시방서에 정한 증명서 및 시험성적서를 반드시 제출하여야 함.

라. 계약업체는 계약 후 다음의 납품서류를 수요기관(LH)에 제출하여야 함.

- 총액계약의 경우 비목별 단가가 명기된 계약내역서(간인필)

- 자재승인 및 신고서류(KS인증서 또는 시험성적서)

- 사업자등록증, 공장등록증, 시국세 완납증명서

- 납품이행 동의서 및 계획서

- 기타계약 및 착수관련 서류

마. 에스컬레이터 설치공사의 준공 전까지 에스컬레이터 전호기의 공인기관 정밀점검 성적서를 제출하여야 함.

바. 현장대리인은 공사 착공 시 반드시 선임하여 상주하여야 하며, 품질관리 전담자 및 안전관리자를 지정하여야 한다.

사. 설치공사 착공 전에 관련공사 수급인과 에스컬레이터 제작․설치에 필요한 사항에 대하여 충분히 협의하여 제작·설치 하여야 함.

아. 납품업체 선정 후 공사착수회의를 개최하여 납품일정 및 납품방법 등을 협의·확정 후 납품을 시작하며, 착수회의 때 확정된 납품 일을 지체할 때마다 지체일수 만큼의 지체상금을 납품업체에서 납부하여야 함.

자. 에스컬레이터의 제작공정이 80%이상 및 조작시험이 가능한 상태일 때 공사감독자로부터 중간 생산과정 검사를 받아야 함.

차. 설계도면 및 시방서에 명기된 사항이 변경이 필요할 경우에는 감독자와  협의한 후에 제작하여야 함.

카. 설계도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기기 특성 또는 기능상

당연히 필요한 사항은 감독자와 협의하여 제작에 반영하여야 함.

타. 계약 불이행 시에는 조달청에 계약해제 또는 해지를 요청 할 예정이며, 계약 해지 시 “국가를 상대자로 하는 계약에 관한 법률" 등 관계법규에 의거 부정당업자로 제재되어 관급자재 납품제한 등의 조치가 취해 질 수 있으니, 반드시 입찰 전 관련시방서, 관련도서 등을 숙지하시기 바람.

파. 에스컬레이터 설치공사를 위하여 사용하는 전기료, 공사중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용, 설치완료 후 완성(수시)검사, 공인기관 정밀점검, 자체검사, 각종 검검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용, 착공일부터 동시준공일까지의 유지보수료 등은 설계금액에 포함되어 있음.

하. 현장여건상 에스컬레이터는 분할형으로 현장에 반입되어야 하며, 계약직후 반입·인양관련에 대하여 관련공종 담당자와 사전협의하여야 한다.

17. 기타 유의사항

가. 계약상대자는 계약체결일로부터 7일 이내에 감독자에게 연락하고 현장을 방문하여 승강로 규격 등에 대하여 협의하여야 한다.

나. 본 에스컬레이터 시방서에서 참조하는 LH 시방서도 계약시방서로 간주 하며, LH주택건설시방서에 근거 적합하게 제작 설치하여야 한다.

다. 골조완료에 따른 승강로 인수․인계를 건축공사 준공일(F) 180일 전까지 건축공사 업체로부터 받아야 하며, F-90일 전까지 에스컬레이터 설치 (완성검사 합격 기준)를 완료하여야 하고, 미준수시는 경고장이 발부됨.

라. 에스컬레이터 완성검사는 입찰공고일 현재 개정·시행된 검사기준을 적용합니다.

마. 납품방법, 수량, 납기일 등은 현장여건에 따라 변동될 수 있음.

바. 계약체결 후 계약 내역서를 작성하여 LH의 승인을 받아야 한다.

사. 부산명지 문화복합시설 건립공사 현장에 제조 및 설치하는 에스컬레이터 2대의 운행상태, 고장, 운전방향, 전원표시 등 감시반에서 필요한 회로는 제어반 내에 배선을 하고, 엘리베이터 감시반과 상호 연동이 될 수 있도록 구성한다. (공사시방서 참조)

18. 참고사항

가. 건축공사기간 : 2021. 11. 25 ～ 2024. 06. 03

나. 납기일과 수량 등은 공사현장 여건에 따라 변경될 수 있으므로 계약 이후 건축공사업체와 소요시기 및 납품일정 등에 대하여 별도 협의 하여야 함.